문서번호	도로보수과-5118
결재일자	2018.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		代정회곤	06/05 김용제
협조

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제1차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

강서도로사업소

(도로보수과)

2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제1차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2018. 3. 8. ~ 2018. 12. 31.

○ 시공업체 : (주)세흥실업  대표 김덕자

○ 도 급 비 : 656,370,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제1차)

○ 작업위치 : 강서구 개화동로(개화치안센터~개화동 지하차도 전) 외 18개소

○ 작업기간 : 2018. 04. 02. ~ 2018. 05. 31.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	106,337천원	83,434천원	감) 22,903천원
관 급 비	21,467천원	19,470천원	감) 1,997천원
총 공사비	127,804천원	102,904천원	감) 24,900천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초(m)	변 경(m)	증·감(m)	증·감 사유
1	개화치안센터~개화동 지하차도 전	10,465	11,435	증) 970	보고내용 참조
2	강서구방화동600-60 (다솜빌딩 인근)	274	0	감) 274	신호기 공사 미시행

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
3	강서구화곡동835-6 (서울도시가스 인근)	48	48	-
4	강서구등촌동631 (증미역3번출구 인근)	114	90	감) 24	현장실측 물량차이
5	영등포구 당산로 229, 당산철교 입구	62	-	감) 62	17년 작업완료 구간
6	구로구안양천로539길11 제니스골프연습장 앞	43	42	감) 1	현장실측 물량차이
7	구로구중앙로1길18-18 (고산초등학교 주변)	917	-	감) 917	신호기 공사 미시행
8	영등포구선유로274, 양화대교남단 연결로	451	583	증) 132	추가 재도색 (횡단보도 3개소)
9	강서구 화곡동 1013-3~공항대로 272	9,504	7,962	감) 1,542	보고내용 참조
10	강서구 공항대로 575~공항대로 553	6,086	7,235	증) 1,149
11	양천구 목동오거리	799	596	감) 203	현장실측 물량차이
12	양천구 목동힘찬병원 앞	1,430	2,252	증) 822	보고내용 참조
13	강서구방화동마곡서1로 139-13인근(마곡유치원주변)	565	0	감) 565	신호기 공사 미시행
14	양천구신월동오목로 강서초교서측	2,313	0	감) 2,313
15	양천구목동목동중앙로 월촌초교앞	2,221	0	감) 2,221
16	방화동도시개발2단지아파트	37	34	감) 3	현장실측 물량차이
17	얀양천로1009(경인초교)	1,573	1,573	-
18	공항초등학교	168	168	-
19	구로구 도림로 29(용해약국)	89	70	감) 19	현장실측 물량차이
합계		37,159	32,088	감) 5,071

○ 보고내용

- 제1차 작업지시 19개소 중 13개소 작업완료 하였고, 신호기 공사 미시행으로 미작업구간은 신호기 공사완료후 작업예정(추후 별도보고).

- 연번 1 “강서구 개화치안센터~개화동 지하차도 전” 작업구간 주변 보도간 횡단보도가 마모(퇴색)되어 5개소 추가 작업 및 당초 누락된 문자·기호 재도색 실시.

- 연번 9 “강서구 화곡동 1013-3~공항대로 272” 차로재구획 구간은 기설치(무단횡단금지시설)된 작업구간 제외.

- 연번 10 “강서구 공항대로 575~공항대로 553” 차로재구획 구간 주변에 퇴색된 안전지대·문자·기호·차선 추가 재도색 실시.

- 연번 12 “양천구 목동힘찬병원 앞” 차로재구획 구간 주변에 퇴색된 일반 및 보도간 횡단보도 각 1개소와 문자·기호·차선 추가 재도색 실시.

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 중 일부 물량 변경이 불가피하여 현장여건에 적합하게 완료하였으며, 작업완료량에 대해서는 추후 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제1차 작업완료 내역서 1부.

2. 제1차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제1차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.