계약금액조정 검토결과서

건 명	2017년 우장산동외 13개동 상수도공사 (장기계속단가계약)			요청기관(부서)		강서수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2018. 6. 4.		공사개요	- D=15~300㎜, L=1,476m
공사기간	2017. 6. 5. ~ 2018. 6. 30.			도 급 자		(주)예건이엔지 대표 김종철
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
617,276	699,545	82,269		82,269	80,795		감)1,474
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 계획(시설관리과-9941, 2018.5.31.) - 최근 3년 평균 수량으로 산출되어 시공 중 증감 사항 발생 - 한파에 따른 수도계량기 긴급교체로 수량 증가
검토내용	○ 수량 조정 - CONC 인력비빔타설(소형구조) : 5.0㎥ → 2.2㎥ - CONC 인력비빔타설 t=5cm(옥내) : 0.02a → 0.04a - CONC 인력비빔타설 t=15cm(10㎡이하) : 1.04a → 1.20a - 시멘트 : 5,482㎏ → 6,136㎏ - 고재처리 : 3,131㎏ → 5,674㎏							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람