문서번호	설비부-7932
결재일자	2018.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		환경설비과장
곽용길		06/11 여인웅
협 조

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사』

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호

요청부서

설비부

요청일

2018년 6 월 일

공 사 명

세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사

공사개요

공사규모

연면적 : 2,998.23㎡, 지하3층~지상1층

- 전력간선 및 동력설비공사, 전등 전열공사, 스노우멜팅 공사, 경관조명공사, 가로등 및 신호등 이설 공사 등

공사기간

2016. 11.28. ~ 2018.10.05.

감 리 사

㈜정림건축종합건축사사무소 외 1개사

설 계 사

터미널7아키텍츠건축사사무소(주)외 1개사

시 공 사

㈜동일전기외 1개사

자문 안건명

주관부서(서북권사업과) 설계변경에 따른 금액 증액

요청금액

**********

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 민원해결, 보수, 보강

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

설계변경사항(요약)

○ 내용 :

- 건축구조 변경, 부하변경, 접기극 변경, 조명 변경, 화재수신기 변경에 따른 물량 증감

- 스노우멜팅설비 추가, 지장물(가로등, 교통신호등) 공사에 따른 물량 증가

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 주요 변경내용

변 경 내 용	○ 변경개요 - 배치 변경에 따른 서북권사업과 재설계용역에 따른 변경 - 지장물(가로등, 신호등) 이설 추가 - 접지방법 변경(당초 접지봉 → 변경 탄소접지봉) 등

▪ 공사비 증감내역

구 분	당초	변경	증·감
전기공사	*********	*********	**********

별첨서류

1. 변경전후 도면 사본 1부

2. 감리단 검토보고서 사본 1부

3. 신규공종 단가결정 근거 1부

4. 설계내역서 1부

▪ 공사 시기

- 2018. 03~10월

▪ 소요관급자재

- 심의대상 아님

건 명 : 세종대로 역사문화 특화공간 조성 전기공사 설계변경

■ 현 황

계 약 명	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 전기공사			시 공 자		㈜동일전기외 1개사
공 사 규 모	연면적 : 2,998.23㎡, 지하3층~지상1층 - 전력간선 및 동력설비공사, 전등 전열공사, 스노우멜팅 공사, 경관조명공사, 가로등 및 신호등 이설 공사 등			계 약 금 액		*********			계약일
									2016.11.25
공사기간	2016.11.28~2018.10.05	감리자	㈜정림건축종합건축사사무소 외 1개사				설계자	터미널7아키텍츠건축사사무소(주)외 1개사
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※작성자 : 곽용길 ☎ 3708-8616

■ 설계변경 개요

구 분	설계변경 개요	******		**** ****
		**	**
강남역 지하상가 전기공사	1. 접지극 변경에 따른 금액 증가(접지봉→탄소봉) 2. 경관조명 추가, 실내등 변경 3. 스노우멜팅 추가(95kW) 반영 4. 가로등 및 신호등 시설 이설 반영 5. 공간 변경에 따른 소방 설비 추가 반영	*******	*******	********
설계 변경 합계		*******	*******	********

■ 설계변경배경

주관부서(서북권사업과)의 설계변경에 따른 전기공사 설계변경 및 접지극 변경, 가로등, 신호등 이설반영에 따른 설계변경.

■ 설계변경세부내용

구 분	내 용	선 택 항 목
설계변경 유형	① 사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡	①,②
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 325,878천원 ② 감액 : ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	③, ⑥ ⑨

※ 해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경경위

○ 설계변경 승인절차

- 감리단 실정보고 → 방침 결정 → 계약금액조정심의 → 설계변경 → 변경계약

○ 계약금액 조정경위

- 공사계약일반조건 제21조에 의거 계약금액 조정