투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(설계변경(총차1회) 승인 알림)

1. 업무지시현장 : 밤고개로 확장 전기공사 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소

2. 작 성 일 자 : 2018-06-14 13:06:04

3. 지 시 내 용

가. 밤고개로감 제2018-90호(2018.06.12.)와 관련입니다.

나. 밤고개로 확장 전기공사 사업진행 중 발생한 설계변경 사항에 대한 설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항 조치내용 및 공사기간 연장에 대하여 승인 하오니 조속히 변경 재계약이 될 수 있도록 조치하여 주시길 바라며,

다. 향후 공사진행과 관련하여 아래 사항에 대하여 유념하여 사업진행에 만전을 기하여 주시길 바랍니다.

1) 공사진행 관련 유의사항

- 사고이월 예산에 따른 전기공사 1차공사 물량 정산조치 필요(설계변경) 및 잔여예산 발생시 조치계획 수립(불용 최소화)

- 도로확장 2구간(SH공사구간) 사업물량 별도관리(예산별도 관리)-2차 공사로 별도 발주예정

- 공기연장에 따른 예정공정표를 재작성하여 공정관리 필요

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							김두환			열빛총괄과장					06/14 유병기
협조자
시행			설비부-8090									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	buckgolje@seoul.go.kr												/	대시민공개