투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 회신(실정보고 승인 알림-월드컵대교 건설 전기공사))

1. 업무지시현장 : 월드컵대교 건설 전기공사(장기-1차) 주식회사 포스코건설

2. 작 성 일 자 : 2018-06-15 13:06:42

3. 지 시 내 용

가. 월드컵(감리) 2018-272호(2018.06.11.)와 관련입니다.

나. “월드컵대교 건설 전기공사(1차)”와 관련 실정보고 내용에 대하여 검토의견이          적정한 것으로 판단되어 실정보고를 승인 회신하오니 공사시행에 만전을 기하여         주시기 바랍니다.

- 승인내용 : 현장여건에 따른 가로등 전기공사 변경 및 선행공정에 맞게 전기공사의        금회 공사분과 장래 공사분을 변경 시공내용 승인

- 기타사항 : 변경내용은 추후 설계변경 및 준공도면에 반영.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							호정오			건축설비과장					전결 06/15 김은덕
협조자
시행			설비부-8163									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개