자문 검토 의견서

○ 강북구청사거리∼번동사거리간 송배수관 정비공사 외 1개소

안 건	검 토 의 견
강북구청사거리∼번동사거리간 송배수관 정비공사 외 1개소	1. 전체 단계에서 보도구간으로 장비 회전시 각종 지장물(가로수, 안전시설물, 신호등 등)로 인하여 회전이 불가능한 구간이 없는지 현장을 재확인하고 불가능한 구간은 차로측으로 회전하는 방안 등 적극적 교통처리 대책 수립하시기 바랍니다. 2. 4단계에서 공사시 공사장비 및 차량으로 인하여 이면도로 진출입 차량의 통행이 불가하므로 이에 대한 대책을 제시하여 주시기 바랍니다(우회도로 설정 등) 3. 6단계, 14(2)단계, 18단계, 23단계에서 횡단보도 공사시 굴착장비로 인하여 횡단보도에 보행자 통행이 불가하므로 이에대한 대책을 제시하여 주시기 바랍니다 (단계 조정, 장비 및 차량의 2열 배치 등) 4. 7(1)단계, 14(2)단계 공사시 굴착장비로 인하여 이면도로 진출입 차량의 통행이 불가하므로 이에 대한 대책을 제시하여 주시기 바랍니다.(우회도로 설정 등)

2018. 06. 15