문서번호	도로보수과-3218
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
송광석	김유찬	06/18 송만규
협 조

『2018년 포장도로 긴급복구 정비공사』

기성준공(1회) 검토 보고

2018. 6.

『2018년 포장도로 긴급복구 정비공사』

기성준공(1회) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『2018년 포장도로 긴급복구 정비공사』와 관련하여 기성검사 결과보고에 따른 기성준공(1회) 검토보고임

Ⅰ		관련근거

□ 설계변경(1회) 검토 보고 : 도로보수과-3060(2018.06.07)

□ 기성(1회)검사 결과보고 : 한국건설관리공사 토목0531-1328호(2018.06.14.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 포장도로 긴급복구 정비공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2018. 3. 7. ~ 2018. 12. 20.

□ 공사개요 : 포장정비 A=242a

□ 도 급 비 : 1,351,746,830원

□ 도 급 자 : 대한건설 대표 김영란

Ⅲ		기성내용

계약금액	전회기성금액	금회기성금액	누계기성금액	누계기성율	잔여금액
1,351,746천원	-	505,945천원	505,945천원	37.43%	845,801천원

Ⅳ		기성내역 검토

□ 기성금액 정산물량 검토

- 대    상 : 제2~6차, 8차 작업완료분 134개소 A=75.04a

- 공사기간 : 2018. 4. 06. ~ 6. 10.

- 작업완료 규모

․ 포장절삭후 재포장(t=5cm) A=11.14a

․ 소파보수 정비(t=5cm) A=63.90a

□ 작업완료 건에 대하여 작업완료보고서, 건설사업관리용역 책임기술자 검토 및 현장 확인결과 서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수공사 시방서 등 관련규정에 적합하게 시공되어 준공처리 하고자 함

Ⅴ		조치계획

□ 상기와 같은 사유로 포장도로 정비공사 건설사업관리용역 책임기술자(한국건설관리공사)가 제출한 기성자료를 근거로 포장도로 긴급복구 정비공사(연간단가) 제1회 기성준공을 시행하고자 함.

붙임  1. 기성검사원 1부.

2. 기성검사 결과보고 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.