“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-12951		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장		부구청장
			김지훈	윤석빈		강태근		박은섭		전결 06/19 주윤중
등록일자	2018.6.18.
결재일자	2018.6.19.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		박철수
					재무과장		이명옥
					계약팀장		박성희

- 선릉로72길 주변 외 3개소 하수관로 개량공사 -

설계변경(정산) 시행 계획

□ 안   건

❍ 우리구에서 시행 중인 「선릉로72길 주변 외 3개소 하수관로 개량공사」의

공종별 물량중감 등의 사항을 반영하여 설계변경 시행

□ 설계변경 사유

❍ 민원발생에 따른 추가구간에 따른 물량 반영

❍ 현장여건 반영에 따른 공종별 물량 증·감 사항 반영

❍ 보험료 등 제경비 정산

□ 공사비 증·감 내역

(단위:원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감	비 고
총 공 사 비	655,606,650	719,365,450	증) 63,758,800
도 급 비	505,573,460	525,390,000	증) 72,355,540
관급자재비	72,226,190	93,301,250	증) 21,075,060
이 전 비	77,807,000	48,135,200	감) 29,671,800

□ 조치계획

❍ 상기와 같은 사유로 설계변경(정산) 시행 후 준공처리.

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 노후 하수관로 추가 정비 계획보고 (치수과-11310호)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 거주민 및 시민다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ● ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ● ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	•
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 무

- 선릉로72길 주변 외 3개소 하수관로 개량공사 -

설계변경(정산) 시행계획

우리구에서 시행중인 『선릉로72길 주변 외 3개소 하수관로 개량공사』의 현장 여건에 따른 물량 증․감 사항 반영 등의 변경사항에 대하여 설계변경 (정산)을 시행하고자 함.

Ⅰ	공사개요

❍ 공 사 명 : 선릉로72길 주변 외 3개소 하수관고 개량공사

❍ 공사기간 : 2018.3.2. ~ 2018.8.28.

❍ 사 업 비 : 금655,606,000원

(도급비 505,573천원, 관급비 72,226천원, 이전비 78,807천원)

❍ 공사규모 : 하수관개량 L=643m, 아스팔트 덧씌우기 35.2a

❍ 시 공 사 : ㈜홍익설비 대표 강오영

Ⅱ	보고내용

❍ 설계변경 사유

- 민원발생에 따른 추가구간 물량 반영

- 현장 여건에 따른 공종별 물량 증·감 사항 반영

- 보험료 등 제경비 정산

❍ 주요물량 증·감 내역

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
흄관 600mm 설치	m	315	461	증) 146
빗물받이 설치	개소	48	62	증) 14
맨홀 설치	개소	19	22	증) 3

❍ 공사비 증·감 내역

(단위:원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감	비 고
총 공 사 비	655,606,650	719,365,450	증) 63,758,800
도 급 비	505,573,460	525,390,000	증) 72,355,540
관급자재비	72,226,190	93,301,250	증) 21,075,060
이 전 비	77,807,000	48,135,200	감) 29,671,800

❍ 계약심사 결과 : 적정함

❍ 제비율 검증, 산업안전보건비 검증 결과 : 적정함

❍ 예산과목 : 치수과, 재난없는 안전강남구현, 하수시설물유지관리, 지선하수관로개량공사, 시설비및부대비, 시설비

재난안전과, 재난예방강남구현, 재난관리추진(재난관리기금), 재난의 효율적관리, 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ	조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 설계변경(정산) 시행 후 준공 처리코자 함.

붙임 1) 설계변경(정산) 내역서 1부.

2) 제비율 검증표 1부.

3) 산업안전관리비 검토결과서 1부.

4) 노후 하수관로 추가 정비 계획보고 1부.  끝.