문서번호	도시철도사업부-5880
결재일자	2018.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신교통1과장	도시철도사업부장
신익현		위성환	06/22 박동룡
협 조
	주무관			왕태현

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사』

상수관 및 소화전이설 실정보고에 대한 검토보고

2018. 06.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사』

상수관 및 소화전 이설 실정보고에 대한 검토 보고

『별내선(8호선연장) 1공구 건설공사』사업구간내 상수관 및 소화전이설 실정보고에 대하여 검토 보고 드림

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

○ 위    치 : 강동구 암사동 강동농협 ~ 암사동 현대홈타운

○ 규    모 : L=1,184m (정거장 1개소, 차량기지 유치선)

○ 공사기간 : 2017.08.23. ~ 2023.08.21.

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사 외 2개사

○ 사 업 비 : 80,199백만원(1차 15,843백만원)

2		보 고 사 항

○ 추진경과

- ‘18.  1.  9. : 상수관 및 소화전 지장물 이설협의 완료(동부수도사업소)

- ‘18.  2.  5. : 상수관로 지장물 이설 계획 제출통보

- ‘18.  6.  5. : 상수관 및 소화전 이설 실정보고 제출

○ 지장물 현황

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
소화전		-	8개소	8개소	지상식 5개소 지하식 3개소
상수관	이 설	-	112m	112m	2개소
	매달기	684m	684m	-
	특수접륜	-	121개소	121개소	매달기 구간

○ 실정보고 검토사항

구 분	적 용	검 토	검토결과
기준단가	서울특별시 도로굴착복구 및 교통시설 기준단가	서울특별시 도로굴착복구 및 교통시설 기준단가	적 정
노 무 비	- 2018년 상반기 대한건설협회 발표 시중노임단가	- 2018년 상반기 대한건설협회 발표 시중노임단가	적 정
재 료 비	- 2018년 1월 시중발표 물가 (물가정보지)	물가자료,물가정보,거래가격조사중 최저금액 적용	적 정
경 비	- 2018년 건설기계 경비산출표 (대한건설협회)	건설표준품셈(2018)건설기계적용 환율 : 2018.1.2. 적용(1US$=1,071.40원)	적 정
내 역 서	현장조사 수량 및 적정성	- 수량확인 계약서 제경비 요율적용 확인	적 정
단가적용	협의단가 적용	- 설계변경시 협의단가 적용률(%) (100%+85.392%)/2 = 92.70%	적 정

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분			당 초		변 경		증·감
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
공사비	직접 공사비	소 계	*	***********	*	***********		***********
		지장물보호 및 복구공	****	***********	****	***********		*
		토 공	*	*		**********		**********
		관로부설	*	*		**********		**********
		구조물공	*	*		*********		*********
		특수접륜공	*	*		***********		***********
		부대공 및 기타	*	*		**********		**********
	간 접 공 사 비			**********		**********		**********
	일 반 관 리 비			*********		**********		**********
	이 윤			*****		*****		*****
	부 가 세		*	*		*
	도급비계			***********		***********		***********

3		건설사업관리단 검토의견

○ 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사와 저촉되는 상수관로 및 소화전 이설에 대하여 관리기관(강동수도사업소, 강동소방서) 협의결과 원인자 이설 및 협의 조건에 따라 도급비에 반영토록 조치하고,

○ 소요예정 이설비에 대하여는 보고사항과 같이 공사의 추진 일정을 고려하여 시공사가 이설 조치토록 승인하여 완료후 설계변경시 결과를 반영하여 정산토록 조치함이 적정함.

- 물량증감 적용 : 계약된 공종단가

- 신규단가 적용

· 공사계약일반조건 제7절(계약금액의 조정) 1.나”에 의거 설계변경 당시 단가(2018.01)에 협의율을 적용하여 산출적용

- 이설협의 조건 반영 : 매달기구간 특수접륜 121개소(∅150~∅300)

5		조 치 계 획

○ 상기 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단되므로 승인조치 하고,

○ 추후 본부 설계변경자문위원회를 거쳐 설계 변경시 반영토록 조치하고자 함.

붙임 : 1) 건설사업관리단 실정보고 1부

2) 지장물이설 설계내역 1부

3) 상수도 및 소화전 이설 위치도 1부

4) 상수관로 이설 개요도 1부. 끝.