설 계 변 경 사 유 서

□ 공 사 명 : 2018년 보안등 유지보수공사(연간단가 2구역)

□ 공사기간 : 2018. 2. 26 ~ 2018. 12. 31

□ 공사개요

○ 램프교체 900개, 안정기교체 500개, 등기구교체 250개

○ LED보안등기구 교체 및 신설 550개

○ 기타 보안등 시설보수 1식

□ 도 급 자 : ㈜정도기전  대표 이재번

□ 설계변경사유

○  주택가 빛환경 개선사업 시행에 따른 LED등기구 교체비 설계반영

(10,102천원 증액)

○  현장여건에 따른 시공물량 조정

□ 주요공종 물량변경내역

공 종	규 격	단위	변경내역			비고
			당초	변경	증·감
등기구 개량	한전주 100W→150W	개소	50	10	감) 40
케이블 설치	CV2.5㎟×2C	M	30	2,000	증)1,970
LED보안등 교체설치	통신주,한전주,건축물	개소	470	550	증) 80

2018. 6.

도 로 과 장