문서번호	자전거정책과-6380
결재일자	2018.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		자전거정책과장
협 조	자전거시설팀장
	주무관

종로 자전거전용차로 시설보완 계획 보고 (종로4가교차로-P턴구간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6. 22

도시교통본부

자전거정책과

종로 자전거전용차로 시설보완 계획 보고 (종로4가교차로-P턴구간)

‘18.4.8일 개통된 종로 자전거전용차로 구간중 종로4가 교차로 P턴차선 앞 자전거교차로 설치방안에 대해 검토보고 드림

□ 현황 및 문제점

○ 교통안전시설개선 설치 통보(서울지방경찰청 교통관리과-1171(2018.5.11.) 하달

- 종로4가 교차로(P턴구간)의 자전거횡단도 직선설치 계획

○ 종로 BRT 공사 준공시기 도래(‘18.7월), 직선 자전거횡단도 설치를 위해 최우선 공정인 교통신호등 이설공사 시행방안 부재

- 도시기반시설본부 설비부(신호등관련)의 경우‘18.4월 공사준공으로 공사업체 부재, 도로사업소 기전부의 경우 시설이관 미완료로 공사시행 어려운 입장

□ 추진방안

○ 공사의 시급성을 감안, 현재 공사중인 「종로 자전거도로 CCTV 통합 교통신호기 설치공사」에 추가하여 교통신호등 이설

	<종로 자전거도로 CCTV 통합 교통신호기 설치공사 개요>
○ 사업 위치 : 종로구 종로1가 외 1개소 ○ 공사 기간 : ‘18.6.11~6.30 ○ 공사 내용 : 신호기 통합설치 외 ○ 총 공사비 : 10,718천원 ○ 시공 업체 : (주) 우진신호

□ 추진계획

○ 「종로 자전거도로 CCTV 통합 교통신호기 설치공사」 의 설계변경을 통해 교통신호등 이설공사 시행 (자전거정책과)

- 변경내용 : 해당공사의 공사금액 및 공사기간 연기 등

○ 교통신호등 이설 후 교통섬 정비 및 자전거횡단도 정비 (도시기반시설본부 토목부)

□ 향후 추진일정

○ ~‘18.7.10일한   교통신호등 이설(기초양생 등 기간소요)

○ 18.7.10일~     교통섬 정비 및 자전거횡단도, 안전시설(표지병등) 설치. 끝.