투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 통보)

1.업무지시현장 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사 도량기업주식회사, G밸리 근로

자 문화 복지센터 건립공사 (주)무영씨엠건축사사무소, G밸리 근로자

문화 복지센터 건립공사 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2018-06-26 10:06:04

3.지 시 내 용

1) PC G밸리 제*******01호(2018.06.15.) 및 PC G밸리 제*******02호(2018.06.18.) 및 PC G밸리 제*******01호(2018.06.20.)호와 관련입니다.

2) 위 대호로 보고 한 건축공사 실정보고, 고압선 방호관 설치, PHC파일 그라우팅용 시멘트 수급방법 변경에 대한 실정보고를 승인하오니 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3) 아울러, 1차 공사 기한내 공사기간 연장 등 계약변경이 이루어질수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							박재웅			환경시설과장					유현수					건축부장					06/27 임인구
협조자
시행			건축부-8802									(						)		접수											(						)
우																					/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2647						/전송			02-3708-2659					/	parkarchi@seoul.go.kr												/	대시민공개