문서번호	토목부-11292
결재일자	2018.6.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김동수	안규홍	김영수		06/28 류훈
협 조

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2018. 6.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계』용역자가 제출한 준공기한 연기 요청에 대하여 검토 보고 드림.

※ 동일(도로) 제18-1679호(2018. 6. 27., 계약기간 변경 요청)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역

❍ 위    치 : 월드컵대교 남단

❍ 규    모

- 월드컵대교 남단 연결로(Ramp-A ~ Ramp-F) 형식변경 등

- 강남방향은 지하차도를 교량으로 형식변경

- 연결로 신설 및 변경에 따른 접속교 종단선형 검토

❍ 용역기간 : 2017. 8. 7. ~ 2018. 6. 30.(공정률 : 60%)

❍ 용 역 비 : 917,600,000원

❍ 용 역 사 : ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링

□ 건설사업관리(설계감리) 용역자(㈜제일엔지니어링) 검토 결과

❍ 준공기한 연기 : 62일

- 용역기간 : 당초 '17. 8. 7.~'18. 6. 30. ⇒ 변경 '17. 8. 7.~'18. 8. 31.

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미 부 과

❍ 연기사유 : '18. 4. 최종 노선선형 확정 후 지하매설물 조사결과 통신, 한전, 도시가스 등 예상하지 못한 지장물이 저촉으로 인한 선형 조정, 실시설계(안) 관계기관 협의 등 설계 완성도   확보를 위하여 2개월의 설계기간 연장이 필요

□ 조치의견

❍ 상기 건설사업관리(설계감리) 용역자의 검토 결과가 적정함으로 준공기한 연기하고

❍ 진행중인 실시설계(안)유관기관 협의 및 행정절차를 신속히 추진하고, 월드컵 대교 건설공사 준공에 지장이 없도록 설계자와 시공자간 긴밀한 협조체계를 유지하여 우선 시공이 필요한 구간 설계도서 선 제공 등 실시설계 용역관리에 만전을 기하고자 함

□ 향후일정

❍ '18. 7. 17. : 특정공법 심의

❍ '18. 8. 10. : 경제성 심사 (계약심사)

❍ '18. 8. 20. : 설계 자문

❍ '18. 8. 25. : 용역완료 보고

❍ '18. 8. 31. : 설계준공

붙임 : 1. 설계감리자 준공기한 연기요청에 대한 검토 의견 공문 1부.

2. 설계용역자 준공기한 연기요청 1부.

3. 예정공정표 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.