문서번호	건축부-8914
결재일자	2018.6.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		문화시설과장	건축부장
이진영		윤용훈	06/28 임인구
협조
	박물관사업팀장		윤정회

「돈화문 민요박물관 건립공사」

실정보고 검토 및 폐토석 처리용역 발주보고

2018. 06.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「돈화문 민요박물관 건립공사」

실정보고 검토 및 폐토석 처리용역 발주보고

『돈화문 민요박물관 건립공사』관련하여 건설사업관리단으로부터 토사의 유분냄새 및 각종 폐기물 혼합으로 사토장 반입이 불가하여 폐토사 로 처리함이 타당하다는 실정보고에 대한 검토 보고임

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 돈화문 민요박물관 건립 건설폐기물(폐토석) 처리용역

○ 위    치 : 서울특별시 종로구 와룡동 5-9 외 2필지

○ 용 역 비 : 326,986,000원(부가세 포함)

○ 용역기간 : 착수일로부터 120일

○ 용역내용 : 건설폐기물 수집·운반 및 처리(폐토사 6,584톤)

○ 계약방법 : 제한입찰(지역제한 : 서울특별시)/긴급입찰

○ 예산과목 : 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 돈화문 전통문화시설 건립, 시설비

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’18. 01. 01 : 공사착수

○ ’18. 02. 28 : 굴착 중 토양오염(유류) 확인

○ ’18. 04. 02 : 오염토양 정화명령(종로구 → 도시기반시설본부)

○ ’18. 05. 15 : CIP 흙막이 공사 완료

○ ’18. 06. 21 : 오염토양 반출 완료(정화처리)

○ ’18. 06. 21 : 토양분석 결과(오염 기준치 미만) 확인(오염토정밀조사 용역업체)

○ ’18. 06. 27 : 건설사업관리단 실정보고(오염 기준치 미만 토양 폐토석 처리)

Ⅲ		실정보고 검토

□ 실정보고 내용

○ 보고내용

- 토공사 계약내역에 따라 지정 사토장에 토사반출 예정이었으나 유분냄새 및 각종 폐기물 혼합으로 사토장 반입이 불가(토사반입 불허 확인서 첨부)하여 건설폐기물(폐토석) 처리요청

- 토양시료분석 결과 토양오염공정시험 우려기준(1)지역에 미달하여 건설폐기물인 폐토석으로 변경 처리하고, 작업 중 일반 토사로 반출 가능 시에는 일반토사 운반 적용 및 금액 정산함이 타당함

○ 처리물량 및 비용

구 분	처리물량(톤)	처리비용(천원)	비 고
폐토사	6,584톤(4,115㎥)	당초 134,212 ⇒ 변경 326,986 (증 192,773천원)

※ 비중 1.6 : 6,584톤(4,115㎥ × 1.6톤/㎥)

□ 처리방안 검토

○ 관련근거

-「건설폐기물 재활용촉진에 관한 법률」제15조 및「동법시행령」제11조

○ 처리방안 검토

- 기존 건설폐기물 처리업체와의 계약 내용에 해당 성상(폐토석)의 처리 내용은 포함되어 있지 않아 설계변경 반영은 불가하며, 관련 규정에 따라(폐기물 처리량 100톤 이상) 별도 발주함이 타당함.

○ 폐토석 처리 용역비 검토

구 분	시장조사가격					적용금액
산출가격 (Ton)	A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	45,150원
	46,150원	56,247원	59,255원	62,255원	45,150원
총용역비 (부가세 포함)	326,986천원 (최저견적가격인 E업체 적용시)					45,150원
용 역 비 검토결과	시장조사 최저가격으로 용역 발주하여 326,986천원으로 시행하려함.(운반비에 스마트 송장 비용 포함)

Ⅳ		처리방안

○	상기 검토 결과에 따라 재무과에 건설폐기물(폐토석) 처리용역 관련 계약심사 및 용역발주(계약) 의뢰하고

○	본 토목공사에 반영되어 있는 사토 처리비(토사 운반비) 134,212천원에 대해서는 추후 감액하여 정산(설계변경) 처리코자 함.

○ 폐토석 반출작업 중 토사로 변경가능 시에는 토사 운반비용으로 적용하고 금액 정산

○	아울러, 해당용역 발주기간 및 사업의뢰부서 설계변경 요청 사항을 반영하여 공사기간 2개월 연장을 검토코자 함

Ⅴ		향후계획

○ ’18. 06 : 계약심사 의뢰 및 용역 발주(계약)의뢰

○ ’18. 07 : 용역계약 및 착수

○ ’18. 08 : 용역준공(예정)

붙임 : 1) 건설사업관리자 실정보고 1부.

2) 과업내용서 1부.

3) 설계내역서 1부. 끝.