- 도봉로35길 34 주변 외 5개소 사각형거 도로함몰 예방공사 -

현안사항 및 준공기한 연기 검토보고

도봉로35길 34 주변 외 5개소 사각형거 도로함몰 예방공사 추진 중 발생한 현안사항 및 준공기한 연기에 대하여 검토 보고드림.

공사개요

Ⅰ

▢ 공 사 명: 도봉로35길 34 주변 외 5개소 사각형거 도로함몰 예방공사

▢ 위    치: 도봉로35길 34 ~ 솔샘로67길 111, 도봉로19길 32 ~ 솔샘로67길 23, 솔샘로67길 20 ~ 도봉로 103, 인수봉로 127 ~ 인수봉로 157, 노해로21길 16 ~ 노해로 91, 도봉로 59 ~ 도봉로 40

▢ 규    모: 사각형거 보수보강

- ▣1.0×0.8 ~ 3.5×1.2, L=969m

공종	규 격	단위	수 량	비 고
단면보수공	단면복구	㎡	1,923.0
	철근노출 단면복구	㎡	99.2

▢ 기    간 : 2018. 3. 9. ~ 2018. 7. 10.

▢ 사 업 비 : 700,000원(서울시 특별교부금)

○ 도급비 659,270천원, 이전비 40,730천원

▢ 도 급 자 : 파워개발(주) 대표 박석흠

보고내용 및 검토의견

Ⅱ

▢ 추가 구간 정비 건

○  「도봉로35길 34 주변 외 5개소 도로함몰 예방공사」 와 관련하여 미아사거리역 주변 공사 추진 중 다음과 같이 추가 정비가 필요한 현장을 조사하여 보고함

사각형거 추가 보수대상 현황

구 분	위치 및 규모	추가 보수물량 (㎡)		추가 총공사비 (천원)	비 고
조사구간	도봉로 40 ~ 월계로 21 ▣1.8 x 1.7 ~ 2.0 x 1.7 L=410m	슬라브	499	436,640	본공사 예산범위(113,072천원) 내에서 조사구간 전체 중 일정구간(슬라브 166.4㎡, 벽체 289㎡, 바닥 112㎡, 연장 153m)을 추가구간 보수대상으로 선정하여 우선시공 ※ 조사구간은 2017년 강북구 하수암거 정밀점검 및 실시설계 용역 결과임.
		벽체	844.6
		바닥	249.2

※ 위치도 및 현황사진 붙임 참고

○ 사업비 현황

구 분	발 주	계 약	잔 액	비 고
도 급 비	659,270천원	576,628천원	82,642천원	낙찰차액
이 전 비	40,730천원	40,730천원	30,430천원	이설비 잔액
총공사비	700,000천원	617,358천원	113,072원

○ 추가 보수대상 조사결과

조사구간[도봉로 40 ~ 월계로 21, 사각형거 ▣4.0×1.0m∼2.0×1.7m L=410m]에 대해서 노후 및 손상이 심한 슬래브 및 벽체, 바닥 부분(1,592.8㎡)이 조사되어 보수가 시급한 실정임

- 전체 구간(410m)중 일부 구간인 [도봉로 40 ~ 도봉로6길 30, 사각형거

▣1.8×1.7m∼2.0×1.7m 슬라브 및 벽체, 바닥 포함 보수면적 567.4㎡  연장 153m]을 금회에 추가보수 구간으로 선정하여 확보된 예산범위내에서 사업비 잔액 113,072천원(낙찰차액 및 이전비 등)을 활용 정비하여 도로함몰 및 풍수해로 인한 안전사고 예방이 필요하다고 판단됨.

○ 금회 추가 소요예산: 113,072천원

- 추가구간 정비로 소요되는 예산은 낙찰차액(82,462천원) 및 이전비 잔액(30,430천원)을 사용코자 함

▢ 준공기한 연기 건

○ 본 공사의 추가구간 정비에 따른 기간이 상당히 소요되고, 이에 따른 정비기간이 장마 및 우기철과 겹쳐 작업 지연이 불가피한 실정으로 추가구간 정비를 위해 준공기한 연기가 필요함.

○ 준공기한 연기

- 변경 전: 2018. 7. 10.

- 변경 후: 2018. 9. 30.

조치계획

Ⅲ

▢ 추가 구간에 대한 정비가 시급한 바 도급자에게 예산범위 내에서 손상구간에 대해 사업의 연속성과 시급성을 감안하여 추가 정비토록 지시하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

▢ 장마 및 우기철, 추가 작업지시로 인한 절대공기 부족에 대해서는 준공기한을 2018. 9. 30.까지 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 하며 우리 구 재무과(계약부서)에 준공기한 연기 의뢰하고자 함.

붙임  1. 추가구간 보수대상 위치도 1부.

2. 추가구간 보수대상 현황사진 1부.

2018.  7.                                                          보고자 : 지방시설주사보  김 근 홍

결재	주무관	하수관리팀장	안전치수과장	건설안전교통국장
	김근홍	代조광희	함명수	전결 07/06 김기운
협조