투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	유남종합건설(주) 대표 우상선
(경유)
제목	작업기간(제2018-2차) 연기 요청에 따른 검토결과 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 유남2018-강서 008(2018.7.9.)호와 관련하여 관급자재 수급 지연에 따른 작업기한      연기요청과 관련하여 아래와 같이 검토결과를 통보하오니, 견실한 시공이 될 수      있도록 공정 및 품질관리에 만전을 기해주기 바랍니다.

가. 검토결과 : 작업기간 연기(승인)

- 당초 : 2018.5.18. ~ 7.15 , 변경 : 2018.5.15. ~ 8.15

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 07/09 박병연
협조자
시행	시설보수과-5317	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개