문서번호	도시철도설비부-6484
결재일자	2018.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	07/09 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018. 7. 6(금)

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018. 7. 6.(금)

□ 금일 실적

급 전	단 전	시운전 시험시간
09 : 23	15 : 23	09 : 44 ∼ 15 : 00

○ 시험내용

- 931~938역 시설물 검증시험

↳ 정위치 정차시험(신호)

- 차상 ATC 절차시 다음역 정위치 정차 확인 시험.

↳ PSD시스템 시험(신호)

- 932,933역 하선 승강장 진출입시 PSD 강제 개방시험

↳ 통합관리시스템 기능상태(통신)

○ 차량탑승인원 :  13명

- 본부: 3명, 공사관계자: 6명, 운영사: 2명, 기관사: 2 명, 교통안전공단: 0명)

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회 사 명	작업 구간	작 업 명	작업 인원	작업 일시
1	궤도	서울메트로9호선운영(주)	918공구 931정거장	터널 도유기 작동방법 및 유지보수 요령교육	류용욱외 3명	7. 6 (단전후 ~ 18:00)
2	토목	대우건설	922공구 정거장,터널	터널 면보수	조운일외 4명	7.6~7.7 (18:00~01:30)
3	건축	삼성물산	932역, 933역	승강장 축소구간 터널 난간설치	박육경외 4명	7. 6 (단전후~21:00)
4	기계	포스코건설 (주)	935정거장	터널. 승강장 고무발판 보완 설치	박종근외 2명	7. 6 (단전후 ~21:00)

□ 시운전 전동차

○ 편성번호 : 6량 편성(939편성 전동차) 1대

○ 주박위치 : 시운전 완료후 개화기지로 입고

□ 기타 특이사항

○ 특이사항 없음.

□ 명일 시운전 계획

○ 시운전 기간 : `18. 7. 9(월)

○ 시운전차량 : 1단계 전동차(4량) 924편성

○ 주       박 : 시운전후 931역 또는 930역 부근에 주박

○ 급      전 : 09:00

○ 시운전 시간 : 09:30 ~ 17:00(주간)

○ 단      전 : 17:10

○ 참  여  자 : 시운전 상황실(3명), 본부(2명), 공사관계자(감리 등) 6명,

기관사 2명, 운영자 3명

○ 시험내용

- 931~ 938역 시설물 검증시험.

↳ 정위치 정차시험(신호)

↳ PSD시스템 시험(신호)

↳ ATS 정차유지 확인 시험(신호)

※ 새벽 시험 추가 실시 예정

- 일      시 :  2018. 7. 9(월) 00:00 ~ 04:00

- 상황실근무 :  2018. 7. 8(일) 22:00 ~ 7. 9(월) 06:00

- 급·단전 시간 : 급전(00:30), 단전(04:00)

- 시운전차량 : 4량 2편성, 6량 2편성

- 참  여  자 : 시운전상황실1명, 본부1명, 운영자1명, 공사관계자 9명,

기관사 3명

- 시험내용 : 송변전 시험

↳ 연장급전시험, 변전소 특성시험,

레일전위 특성.  끝.