문서번호	관광사업과-6417
결재일자	2018.7.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	관광안내서비스팀장	관광사업과장
신유미	김문형	07/11 김태명

- 다국어 표지판 표기오류 정비사업 -

물품변경계약(기한연장) 체결계획

2018. 7

다국어 표지판 표기오류 정비사업

물품변경계약 체결계획

표지판 직접 정비과정에서 정비대상 표지판 소관부서와의 협의과정이 지체되어 준공기한을 연기하고자 함

□ 추진 배경

○ 2018.1차 다국어 표지판 외국어 표기오류 정비계획(관광사업과-4082, 2018.4.26.)에 의거 체결한 물품계약(관광사업과-4760) 후 정비를 진행하고 있으나,

○ 표지판 정비를 위한 소관 부서와의 협의과정이 다소 지체되어 준공기한을 연장하는 물품변경계약을 체결하고자 함

□ 물품계약 개요

○ 납품 기한: 2018. 7. 9.

○ 계 약 자: *********

○ 계약 금액: *************************

○ 주요 내용: 다국어 표지판 표기오류 정비사업

□ 변경 사항

○ 변경 개요

구 분	변 경 전	변 경 후
계약기간	당 초	2018.5.10. ~ 2018.7.9.
	변경후	2018.5.10. ~ 2018.8.31.

○ 변경 사유

- 관광사업과에서 직접 정비를 시행하는 표지판 소관부서와의 협의 과정이 다소 지체되어 계약기간을 연장하고자 함

□ 귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 서울특별시

- 표지판 소관부서와의 협의기간 확보를 위한 계약기간 연장

○ 지체상금 : 미부과