문서번호	시설보수과-5403
결재일자	2018.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김규춘		전결 07/12 박병연
협 조
	주무관			윤동원
	주무관			강연홍
	주무관			김승진

작업완료보고 (제1차)

“2018년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가 등)”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

시설보수과

작업완료보고(제1차)

2018년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가등)

2018년 도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)작업완료보고(제1차)에 따른 검토결과 보고임

□ 공사현황

❍ 공사명 : 2018년 일상유지보수공사(교량,고가등)

❍ 공사개요 : 총34개시설(교량21, 고가7, 램프6)

❍ 공사기간 : 2018. 4. 13 ~　12. 31

❍ 공사금액 : 1,082,106천원

❍ 계약자 : 유남종합건설(주) 대표 우상선

❍ 공정율 : 45%

□ 작업지시 완료 내역

❍ 관련근거

차수	작업지시		작업완료		비고
	관련근거	작업기간	관련근거	접수일
1차	시설보수과-3266 (2018.4.25.)	2018. 4. 25 ~ 6. 30	유남종합건설 2018-강서007	2018.6.29

❍ 작업지시 및 완료 내용

- 대상시설 : 오금교외 13개 시설

- 개략공사비 : 138,174백만원

- 세부작업내역

연번	시설명	위치 및 손상내용	작업완료내역	수량			단위	작업조건
				당초	완료	증,감		주간	야간
1	오금교	A1 신축이음덮개 파손	방호벽차수보수공Joint 설치	0.5	0.5	-	m	○
2	오목교	A2 램프진입부 난간파손	난간파이프교체(AL)	2.5	2.5	-	m	○
3		A2 램프연석부 열화	콘크리트 표면보수(레미가드)	0.9	0.9	-	㎡	○
4	여의2교	A1높이제한표지판파손	높이제한표지판교체	1	1	-	개소	○
5	개봉철도고가	P3 점검통로 시건장치 망실	시건장치 교체	1	1	-	개소	○
6		A1, A2 위험표지판 설치	위험안내표지판설치	2	2	-	개소	○
7		A2측 CON'C방호벽 정비	일일노무	-	1	1	일	○
8		A1,A2측 표지판 철거	일일노무	-	1	1	일	○
9	가리봉 철도고가	육교교각 빗금도색	안전빗금도색	11.7	9.2	-2.5	㎡	○
10		육교계단교각 CON'C파손	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	0.3	0.21	-0.09	㎡	○
11		육교 상부 난간	가드레일보수	15.5	15.5	-	경간	○
12		육교 상부 중앙부 물고임	철근콘크리트깨기	0.1	0.1	-	㎥		○
13			교면방수	0.5	0.5	-	㎡		○
14	개화IC교	종점부옹벽날개벽 배수구막힘	일일노무(배수구정비)	1	1	-	일	○
15		교량하부 유도배수로 파손	유도배수로설치(STS)	10	10	-	m	○
16		슬라브 하면 미세균열	콘크리트 표면보수 (레미가드)	374	374	-	㎡		○
17		중앙 기둥 안전빗금도색	안전빗금도색	63.8	74.9	11.1	㎡	○
18		고촌IC방향 포장부파손	소규모긴급도로복구	1	1	-	개소		○
19	오류철도고가	A1,A2 보도부 연석 정비	콘크리트 표면보수 (레미가드)	50	50	-	㎡	○
20	행주1교	통과높이제한 표지판 파손	통과높이제한고무판교체	1	1	-	개소	○
21	행주2교	A1,A2 하부 점검통로 설치	점검통로설치(A-TYPE)	12	12	-	m	○
22		A1,A2 하부 점검사다리 설치	점검사다리설치(하향식)	2	2	-	개소	○
23	신월IC교	높이제한표지판 파손	일일노무(표지판제거)	1	1	-	일	○
24	여의하류2교	교량 중간부 조인트 누수	방호벽차수보수공Joint 설치	31	28	-3	m	○
25	시흥IC교	매쉬휀스 파손	일일노무	2	-	-2	일	○
26			매시휀스 파손부보수	-	1	1	식	○
27	화곡고가	양천구측 시점 보행자 난간파손	난간지주교체(AL)	2	2	-	개소	○
28		양천구중앙로측높이제한 시설정비	차량높이제한시설보수및이설	1	1	-	개소	○
29		P1, P2 교각상부 조류서식	조류방지시설물설치 (스파이크니들)	80	80	-	m		○
30		A2 점검통로 보행자 충돌위험	일일노무(충돌위험부제거)	1	1	-	일	○
31		화곡동교량종점보행자 난간파손	교량용보도난간교체(AL)	1	8	7	m	○
32		양천방향중간지점교량 난간정비	일일노무(난간정비)	1	1	-	일	○
33		강서방향 시점부 교량명판 정비	시설물관리명판 반사지부착	1	1	-	개소	○
34		강서방향시점부빗물받이 뚜껑망실	빗물받이뚜껑설치	1	1	-	개소	○
35	고척교	A1교대측벽파손및교량 하부철근노출	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	5.68	5.68	-	㎡	○

□ 주요 점검사진

개화IC 표면보수 및 안전빗금 도색	행주IC교 점검통로 설치	화곡고가 보행자안전난간 설치	가리봉철도고가 보행자 안전휀스 설치

□ 검토의견

❍ 작업지시 보고 내용 확인결과 이상없이 적정 시공 완료 되었기에 향후 설계변경 시

반영 처리코자 함.

따로붙임  작업완료보고(제1차)서류 1부(별도첨부).  끝.