주요 심사내용

□ 공 사 명 : 망우동 우림시장주변 외 사각형거 보수보강

□ 사업개요

위 치	중랑구 망우동 우림시장 주변 외
공사개요	-콘크리트 단면보수: A=6,882㎡ -콘크리트 방청보수: A=659㎡ -준설작업구(덮개) 제작 및 교체: 23개소
공사기간	착공일로부터150일간

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,612,300	천원
◦	심사금액	:	2,571,580	천원
◦	절 감 액	:	40,720	천원
◦	절 감 률	:	-1.6	%

□ 주요 심사 내용

◦ 자재단가 조정

- 각재(외송):407,184원/㎥→369,000원/㎥ 외8종 조정

◦ 일위대가 조정

- Hi-fer공법

· 프라이머도포: 잡재료비6%→3%

- Mcrete공법

· 녹제거:0.3454㎡→0.3㎡,철재면의30%적용

- ERH

· 케미컬앵커볼트설치 : 도면수량 적용

· 콘크리트치핑: 인력→기계

◦ 단가산출 조정

- 동력분무기:주연료7.5ℓ→1.3ℓ,표준품셈9-3

- 공사용조명설치및철거: 표준품셈16-5-2적용

- 암거, 침사지등 인력준설 절취 조정 : 0.2 → 0.16,

표준품셈 3-1-1, 토사절취(보통토사) 적용

- 물돌리기 THP관 조정: 표준품셈16-2적용

· 손율: 표준품셈2-3-1적용

→ 전기아연도강판적용:20%→16%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회운영)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 특별시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

· 사각맨홀덮개설치(앵커볼트설치 등)관련 도면 보완

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 단면복구 및 보수공법중 칠공사관련 ‘공사시방서 보완후 발주’ 조치

가) 도색방법을 공사시방서에 구체적으로 표시

- 1회 도장은 00kg(ι)을 00도구(로울러 등 구체적으로 표시)로 도색

- 2회 도장은 1회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

- 3회 도장은 2회 도장 00분 경과 후 00kg(ι)을 00도구(로울러등 구체적으로 표시)로 도색

나) 재료의 단위중량 산출을 위한 비중을 공사시방서에 구체적으로 제시

다) 재료의 구성인자 제시 : 수성 및 유성 표시