하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	재정관리부장
(경유)

제목	2018년 주요업무 세부시행계획 목표공정률 변경 요청

1. 전기사업부-3030(2018.07.20.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리공사에서 시행중인 「서울항동 공공주택지구 전기 및 교통신호등 공사」

외 1건과 관련입니다.

3. 위 공사와 관련하여 아래와 같은 사유로 당초 수립된 2018년 주요업무 세부시행계획 목표 공정률을

붙임과 같이 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

~   아   래   ~

가. 서울항동 공공주택지구 전기 및 교통신호등공사 외 1건

공 사 명	목표공정률 변경사유	공 사 기 한		비고
		당 초	변 경
서울항동 공공주택지구 전기 및 교통신호등공사	공사기간 연장	2018.11.03	2019.10.31	공기연장 방침 (첨부)
항동공공주택지구 택지 조성 및 공원관리사무소 정보통신공사		2018.11.03	2019.10.31

붙임  1. 2018년 주요업무 세부시행계획(항동지구 택지 전기 및 정보통신공사)

2. 준공기한 연기검토 보고 및 변경계약 시행(안)-일상감사.  끝.

	전 기 사 업 부 장

부 원						전기사업부장				에너지기술사업처장		07/24
		김동주						천영범			이원풍
협조자	부 원		신희승

시행			전기사업부-3095				(2018.07.24)			접수				()
방침번호
우	06336			서울시 강남구 개포로 621								/
전화		02-3410-8980			전송	02-3410-8993		/	happydj@i-sh.co.kr					/	공개