전기사업부

(건설안전사업본부 에너지기술사업처)

▢ 추진목표

사 업 명	세부 업무명	사 업 개 요	사업비 (백만원)	사업기간	추진목표(%)
					18년	19년	20년	21년 이후
항동지구 택지전기공사	배관공사 배선공사 장비설치공사	ㅇ 위 치 : 구로구 항동 일대 ㅇ 대지면적(연면적) : 662,525㎡ ㅇ 규 모 : 가로등 237, 신호등 74본	1,989	`16.08 ~`19.10	55.0	100	-	-
항동지구 택지통신공사	배관공사 배선공사 장비설치공사	ㅇ 위 치 : 구로구 항동 일대 ㅇ 대지면적(연면적) : 662,525㎡ ㅇ 규 모 : CCTV 127개/80개소, WIFI 31개/31개소	1,032	`17.07 ~`19.10	19.0	100

[변경 전]

<사업개요> ㅇ 사 업 명 : 항동지구 택지 전기공사 ㅇ 위 치 : 구로구 항동 일대 ㅇ 대지면적(연면적) : 662,525㎡ ㅇ 규 모 : 가로등 237, 신호등 74본 ㅇ 사업기간 : 2016.08. ~ 2018.11.	업 무 담 당 책 임 자
	소 속	직 위	성 명
	전기공사부	부 장	신 명 범

○ 전기공사

(단위 : 백만원, %)

세부 업무명	총 사업비	추진 기간	기 추진	2018년 세부시행계획													19년	20년	21년 이후	담당자
				계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계	1,989	`16.08 ~`18.11	24.0	100	26.0	28.0	30.0	33.0	36.0	40.0	45.0	55.0	65.0	85.0	100	-	-	-	-	김창수
배관공사	656		11.0	34.0	14.0	16.0	17.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	24.0	28.0	34.0	-	-	-	-
배선공사	476		7.0	21.0	8.0	8.0	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0	12.0	14.0	17.0	21.0	-	-	-	-
장비 설치공사	857		6.0	45.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	10.0	15.0	24.0	27.0	40.0	45.0	-	-	-	-

<사업개요> ㅇ 사 업 명 : 항동지구 택지 통신공사 ㅇ 위 치 : 구로구 항동 일대 ㅇ 대지면적(연면적) : 662,525㎡ ㅇ 규 모 : CCTV 127개/80개소, WIFI 31개/31개소 ㅇ 사업기간 : 2017.07. ~ 2018.11.	업 무 담 당 책 임 자
	소 속	직 위	성 명
	전기공사부	부 장	신 명 범

○ 정보통신공사                                                                (단위 : 백만원, %)

세부 업무명	총 사업비	추진 기간	기 추진	2018년 세부시행계획													19년	20년	21년 이후	담당자
				계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계	1,032	`17.07 ~`18.11	3.0	97.0	3.0	3.0	4.0	7.0	10.0	13.0	17.0	30.0	45.0	85.0	100	-	-	-	-	양승진
배관공사	381		3.0	34.0	3.0	3.0	4.0	6.0	9.0	12.0	15.0	25.0	30.0	37.0	37.0	-	-	-	-
배선공사	200		0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0	15.0	20.0	20.0	-	-	-	-
장비 설치공사	451		0.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	43.0	-	-	-	-

[변경 후]

<사업개요> ㅇ 사 업 명 : 항동지구 택지 전기공사 ㅇ 위 치 : 구로구 항동 일대 ㅇ 대지면적(연면적) : 662,525㎡ ㅇ 규 모 : 가로등 237, 신호등 74본 ㅇ 사업기간 : 2016.08. ~ 2019.10.	업 무 담 당 책 임 자
	소 속	직 위	성 명
	전기사업부	부 장	천 영 범

○ 전기공사

(단위 : 백만원, %)

세부 업무명	총 사업비	추진 기간	기 추진	2018년 세부시행계획													19년	20년	21년 이후	담당자
				계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계	1,989	`16.08 ~`19.10	24.0	100	26.0	28.0	30.0	33.0	36.0	40.0	41.0	43.0	45.0	48.0	52.0	55.0	100.0	-	-	김동주
배관공사	656		11.0	34.0	14.0	16.0	17.0	19.0	19.0	19.0	20.0	22.0	24.0	26.0	29.0	29.0	34.0	-	-
배선공사	476		7.0	21.0	8.0	8.0	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	13.0	15.0	21.0	-	-
장비 설치공사	857		6.0	45.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	45.0	-	-

<사업개요> ㅇ 사 업 명 : 항동지구 택지 통신공사 ㅇ 위 치 : 구로구 항동 일대 ㅇ 대지면적(연면적) : 662,525㎡ ㅇ 규 모 : CCTV 127개/80개소, WIFI 31개/31개소 ㅇ 사업기간 : 2017.07. ~ 2019.10.	업 무 담 당 책 임 자
	소 속	직 위	성 명
	전기사업부	부 장	천 영 범

○ 정보통신공사                                                                (단위 : 백만원, %)

세부 업무명	총 사업비	추진 기간	기 추진	2018년 세부시행계획													19년	20년	21년 이후	담당자
				계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
계	1,032	`17.07 ~`19.10	3.0	100	3.0	3.0	4.0	7.0	10.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	100.0	-	-	신희승
배관공사	381		3.0	37.0	3.0	3.0	4.0	6.0	9.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	37.0	-	-
배선공사	200		0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	20.0	-	-
장비 설치공사	451		0.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	-	-