투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(창동역 고가하부 문화예술공방 조성 기계공사)

우리 본부에서 추진 중인 『창동역 고가하부 문화예술공방 기계설비공사』 와 관련, 계약변경 사항이 있어 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 창동역 고가하부 문화예술공방 기계설비공사

나. 계약자 : ㈜일성이엔지 대표 이 영 희

다. 변경내역                                                   (단위:원)

구분	당 초	변 경	증 · 감
계악기간	`17.12.15.~`18.11.01	`17.12.15.~`18.11.01	변경없음
계약금액	17,835,300원	6,078,900원	(감)11,756,400원

라. 계약변경 사유 : 주관부서 사업계획 변경에 따른  물량 및 내역 증·감

따로 붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 관련 문서[설계변경내역서 및 합의각서 포함] 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	윤대영		시책사업과장	임병국		설비부장	07/30 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-10519	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8651	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(6)