투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 3단계 시설물검증시험 결과 보고에 따른 자료 제출 요청

1. 9호선 3단계 종합시험운행(시설물검증시험)과 관련입니다.

2. 2018. 7. 27(금) 시설물검증시험 종료회의시 한국교통안전공단에서 요구한 자료가

있어 통보하오니 9호선 3단계 918~923공구 책임감리원 및 운영사는 2018. 8. 1(수)

14시까지 기한엄수하여 우리시(도시철도설비부)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 918~923공구 책임감리원, 현장대리인

- 승강장 연단측정 결과(전동차 투입후 승강장 연단측정 자료)

- 승강장 축소구간 출입통제시스템 설치 및 연동시험 결과 등 진행현황

- 소방, 에스컬레이터, 엘리베이터 필증 발급 현황 (필증 없을시 상세 진행현황을 제출)

- 관제설비(PSD 고장 이벤트, 공조기, 본선환풍기, 승강설비, 집수정 등)에 대한 시험결과

- 935역 승강장 PSD(가동식발판) 장애시 조치방안 및 안전(운영)계획서

↳ 관제사, 기관사 확인방법, 고장 조치방법 등 포함

나. 운영사

- 시민불편을 감안하여 영업시운전 시작일(금요일 → 토요일) 조정

↳ 시작회의와 종료회의는 변동없음.

- 1~2단계 운영사 기관사 교육실적 및 9.1 전까지 구간인증 완료계획

- 종합운동장역 승객 하차여부 확인여부 보고체계 및 안전관리방안계획

- 9. 1(토) 전까지 개통 열차운행계획 및 시각표 확정

↳ 935역 운행속도 변경에 따른 소요시간 지장 검토

↳ 셔틀급행 운행 확정시, 2단계 영업시운전 기간에 반영

↳ 영업시운전 1단계 기간에 토/일 시운전 시행여부

- 시험절차서의 시험항목별 시험기준, 시험일정 등 보완

- 종합운동장역 승객 하차여부 확인 등 안전관리방안

- 철도종합시행지침에 맞게 영업시운전 세부 계획서 작성

↳ 기 통보한 종합시험운행 시행 계획(변경) 목차에 맞게 상기내용 반영,

영업시운전 시험자 지정(1~2단계 운영사 각각 지정하고, 지정된 시험자는

시험일정 반드시 참여), 열차운행계획, 안전관리계획 등.

↳ 운전취급, 전차선 급단전 방법 등 상세 절차 포함

↳ 한국교통안전공단에서 요청(메일로 통보)한 내용 반영.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,도시철도건축부장,9호선 3단계 918~923공구 책임감리원, 현장대리인, 시스템분야 책임감리원, 서울메트로9호선운영(주), 서울9호선운영(주)
주무관			차량과장			도시철도설비부장
협조자
시행	도시철도설비부-7273	(	2018.7.31.	)	접수	도시철도토목부-9307	(	2018.7.31.	)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7290	/전송	772-7308	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	대시민공개