안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	궤도분야 SCM사업 추진현황 보고(`18.상반기)

1. 관련근거

가. 기획처-170호(`18.1.10)「2018년도 경영목표 및 사업계획 통보」

나. 궤도처-20149호(`18.6.5) 「궤도분야 SCM(레일온도·살수장치 자동화시스템 구축) 업무담당자 지정 요청」

2. 위와 관련 궤도분야에서 추진중인 SCM사업에 대한 상반기 추진실적 및 하반기 추진계획에 대하여 아래와 같이 추진현황을 보고합니다.

가. 레일온도·살수장치 자동화시스템 구축(SCM)

1) 추진실적

- 궤도분야 SCM ASIS-TOBE 과제 템플릿 작성(2월)

- 살수장치 현장조사 및 기술자료 수집(2~3월)

- 유관기관 설치사례 및 과제구체화 협의(4~5월)

- 궤도1,2사업소 담당자 및 관련업체(진영ENC) 회의 시행(`18.6.15. 14:00~17:00)

→ SCM사업 시범구축 대상 선정, 시범설치 견적 산출(6월)

2) 추진계획

- 자동살수시스템 시범구축 시행(안) 수립 및 설치(7월~8월)

- 시범운영 검토 및 확대시행 방안 마련(8~12월)

나. 레일도유기 유지관리 원격시스템 구축(SCM)

1) 추진실적

- 궤도분야 SCM ASIS-TOBE 과제 템플릿 작성(2월)

- 레일도유기 설치현황 조사 및 기술자료 수집(2~4월)

- SCM사업 과제 구체화 협의 및 레일도유기 제작업체 기술자료 검토(5~6월)

※ 붙임 제작업체 기술자료(Smart Control System) 참조

2) 추진계획

- 레일도유기 원격제어시스템 업체 시현 및 적용 검토(7월~8월)

- 시범시행 대상선정 및 시범설치, 확대시행 방안 마련(9~12월)

붙임 : 레일도유기 제작업체 기술자료 1부.

과장		부장		처장	07/05
협조자	궤도처 부장
시행	궤도처-20648	(	2018.07.05.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화		/전송		/	conlsd@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격