문서번호	도시철도설비부-4586
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
정해철	임정규	05/20 정찬웅

9호선 2단계 구간 시운전 상황보고

(2014.5.19)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 시운전 상황 일지

2014.5.19.(월)

□ 금일실적

급전	단전	시험시간
09:38	17:34	13:30~17:00

○ 시험 내용

- 신호 TDC 시험

· 선로데이터 측정 및 시험용 차상 ATC-CUC보드 프로그래밍

· 930정거장 MTIB(이동열차 초기화 비콘) 거리역산 확인

· 929~930(상하선) MTIB 거리측정(차량의 오도메터와 ATC데이터 확인)

※ ATC데이터와 차량 측정자료와 오차발생→ATC데이터 제작사 요청

○ 참여인원 : 13명 (본부 : 6명 , 시공사 : 4명, 감리단 : 1명, 기관사 2명)

(상황실근무자 : 황철호, 이재구, 정해철, 민종태, 이진근)

□ 본선 출입승인 사항 : 없음

□ 기타

○ 929 변전소 종합연동시험

- 19:00~익일07:00(RTU 및 전력관제 연동시험)

□ 5.20(화) 시험계획

○ 신호시험

- TDC(Track Data Checking) 시험(ATC데이터 수정자료 탑재 예정)

- 시험구간 : 926~930(상선)

○ 929변전소 연동시험

- ‘14.5.19(월) 19:00 ~ 익일07:00