안심․고품질 농수산물 유통의 선도기업

		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	건어제2경매장 임시매장 조성공사(토목, 조경) 시행

1. 관련문서

가. 건어 제2경매장, 건어종합상가 이전 배치 계획(수산팀-564, ‘18. 3.14)

나. 건어 제2경매장, 건어종합상가 이전 업무 협조 요청(수산팀-638, ‘18. 3.22)

다. 건어제2경매장 대체매장 조성공사 시행(건설공사팀-467, ‘18. 4.20)

라. 건어제2경매장 대체매장 조성공사 설계도서(수정) 송부(설계관리팀-399, ‘18. 4.24)

2. 위 호와 관련하여 도매권역 시설현대화사업 부지확보 및 관련 유통인 이전을 위한 건어 제2경매장 대체매장 조성공사(토목, 조경)를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 건어제2경매장 대체매장 조성공사(토목, 조경)

나. 공사개요

1) 위    치 : 서울특별시 송파구 양재대로 932(가락동 600) 건어종합상가

2) 공사내용 : 철거공사 및 포장공사(320㎡)

다. 공사기간 : 착공일로부터 50일

라. 소요예산 : 일금 이천삼십삼만이천원정(₩ 20,332,000원, 부가세 포함)

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 대체매장건립

바. 예산현황                                                        (단위:천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
대체매장건립	1,000,000	691,790	691,790	20,332	287,878

사. 계약방법 : 전자공개수의계약

아. 입찰참가자격

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 함)시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 동법 시행령 제92조에 의한 부정당업체가 아닌 자로서 아래 조건을 모두 만족하는 업체

2) 건설산업기본법에 의한 포장공사업(업종코드0021)을 갖춘 업체로서, 주된 사무소의  소재지가 서울특별시에 소재한 업체

붙 임 :	1.	주 요 투 자 사 업 사 전 심 사	..................	1부.
	2.	공사개요	..................	1부.
	3.	예정공정표	..................	1부.
	4.	청렴계약이행서약서	..................	1부.
	5.	부당계약특수조건 체크리스트	..................	1부.
	6.	설계도면	..................	1부.
	7.	수량산출서	..................	1부.
	8.	내 역 서	..................	1부.
	9.	시방서	..................	1부.
	10.	관련문서사본	..................	1식.	끝.

담당						팀장				건설안전본부장		04/27
		문윤경						강성규			김승호
협조자	팀장		김승로

시행			건설공사팀-497				(2018.04.27)			접수				()
우				서울특별시 송파구 양재대로932								/
전화		3435-0566			전송	3435-0557		/	2012077@garak.co.kr					/	공개

공   사   개   요

1.	공 사 집 행 상 황
	가.	공사 개요
		○ 위 치 : 건어종합상가(건어제2경매장 임시매장) ○ 내 용 : 철거공사 및 포장공사(320㎡)
	나.	책 정 된 예 산 액	:	100,000천원
	다.	기 집 행 액	:	691,790천원
	라.	금회예산배정액	:	20,332천원
	마.	금 회 집 행 액	:	20,332천원
	바.	집 행 잔 액	:	287,878천원
	사.	금후집행계획	:	있 음
2.	관 급 자 재 내 역		:	없 음
3.	설 계 자 소 속		:	설계관리팀		가급	김 장 식
4.	설계심사자소속		:	설계관리팀		팀장	장 기 주
5.	감 독 자 소 속		:	건설공사팀		가 급	문 윤 경
6.	검 사 자 소 속		:	건설공사팀		팀장	강 성 규
7.	기 성 고 지급횟수		:	없 음
8.	하자보수 보증금율 및 기간		:	3/ 100
9.	지 체 상 금 율		:	0.5/ 1000
10.	설 계 서 열람장소		:	건설공사팀

예  정  공  정  표

○ 공 사 명 : 건어제2경매장 임시매장 조성공사(토목, 조경)

○ 공사기간 : 착공일로부터 50일간

○ 공 정 표

구 분	착공일로부터 공정표
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
□ 공사 계약
□ 장비 및 자재 준비
□ 철거 공사
□ 포장 공사
□ 현장 정리

서울특별시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 건어제2경매장 임시매장 조성공사(토목,조경)에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 공사 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를  막론하고 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라  책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777

FAX   768-8846

2018.   4.

서울시농수산식품공사
		계약부서	경영본부장	김성수
			재무팀장	김이종
			계약담당	문민호
		발주부서	건설안전본부장	김승호
			건설공사팀장	강성규
			감독담당	문윤경

「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

용 역 명	건어제2경매장 임시매장 조성공사(토목, 조경)
발주부서	부서명	건설공사팀	작성자	문윤경	연락처	02-3435-0566
계약부서	부서명	재무팀	작성자	문민호	연락처	02-3435-0384
제출일자	2018. 4.

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□