의원 요구 자료 제출

시 행	교량안전과-13810
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(교통수석전문위원),기획담당관,안전총괄과장

전문관		기술점검팀장	교량안전과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
이성주		박영권	김종호	하종현	08/03 김학진
협 조
	도로시설계획팀장				윤장혁
	주무관				이민경

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 114번, 오중석의원, 교통위원회)

붙임 : ․시의원 요구자료 1부.  끝.

오중석 의원( 교통위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 114번

□ 요구내용

○ 신이문고가차도 관련

- 최근 5년간 정밀안전진단 결과와 이에 따른 내구성, 기능 저하 방지 등을 위한 보수·보강 사업 내역

- 고가철거 및 지하화에 대한 향후 계획과 이와 관련한 일체 자료

□ 오중석 시의원께서 제출요구한 사항에 대하여 아래와 같이 자료 제출 합니다.

1) 최근 5년간 정밀안전진단 결과와 이에 따른 내구성, 기능 저하 방지 등을 위한 보수·보강 사업 내역

○ 정밀점검 시행 : 2년에 1회 이상(B,C 등급)

※ 2종 시설물 : 정밀안전진단 대상 아님(주요 결함 등 사유발생시 정밀안전진단 시행)

시행년도	점검 방식 (용역 업체)	용역비 (백만원)	상태등급	용역기간	점검 결과
2013	정밀점검 (외부전문가 합동)	9	C	‘13.07.22.∼11.30.	- 주부재 경미한 결함, 보조부재 결함 발생 ※ 보수·보강 공사 중으로 완료 이후 등급 상향(C→B)
2015	정밀점검 ((주)케이엠비건설)	30	B	‘15.03.10.∼09.05.	- 일부 배수관 막힘 및 누수 등 발생으로 일상 보수 필요
2017	정밀점검 ((주)나우이엔씨)	31	B	‘17.02.27.∼08.25.	- 포장부 부분 노후화에 따른손상 발생으로 보수 필요

○ 보수·보강 사업 내역

공사명	시공업체	공사비 (백만원)	공사기간	공사내역
이문고가보수·보강공사	신원특수건설㈜ 외 1개사	3,402	‘13.03.20. ∼‘14.07.31.	- 교면방수 및 재포장 78a - 교좌장치 교체 80개소 - 난간정비 1,060m - 신축이음 교체 192m - 외부강선 보강·보수 12개 - 단면 및 표면보수 12,346㎡ 등
‘15년 시설물 연간 단가공사	웅원건설㈜	1	‘15.11.22. ∼12.10.	- 충격흡수시설 1개소
‘16년 시설물 연간 단가공사	아하엔지니어링㈜	12	‘16.10.04. ∼11.15.	유도배수로 설치 15m 배수관 세정 299m 교각번호판 정비 42개소 등
‘17년 시설물 연간 단가공사	㈜신기원종합건설	69	‘17.10.10. ∼12.05.	교면방수 및 포장 675㎡ 등

2) 고가철거 및 지하화에 대한 향후 계획과 이와 관련한 일체 자료

○ 현재 우리 시에서는 이문고가차도 철거 및 지하화 계획 없음.   끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과 교량안전과)	담당사무관 담당사무관	윤장혁 박영권
	☎2133-8083 ☎2133-1978	주무관 주무관	이민경 이성주
	작 성 일 : 2018. 8. 3.