문서번호	시설과-3409
결재일자	2018.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
강상범	박관현	임원빈		08/03 송인호
협 조	학예연구부장		박현욱
	총무과장		허혜경
	유물관리과장		한은희
	주무관		한정화
	주무관		장은혜

은평수장고 RFID인프라 구축계획

2018.  8.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

은평수장고 RFID인프라 구축계획

서울역사유물관리시스템 운영과 관련 은평수장고에 RFID 인프라를 구축하여 유물 출납업무의 효율성을 제고하고 수장고 보안 관리를 도모하고자 함

1		추진근거

□ 은평수장고 공사 추진계획 (유물관리과-2240호, 2017.7.17.)

□ 2018년 정보화사업 예산타당성 심사결과 통보(정보화기획담당관-15667호, 2017.9.26)

□ 서울기록원내 은평수장고 공사 추진계획(시설과-664, 2018.2.12.)

2		추진경과

□ 서울역사유물관리시스템 구축 사업 추진(255백만원) : ‘12. 8 ~ ’13. 2

□ 서울역사유물관리시스템 운영 : ‘13. 3 ~

□ RFID 인프라(S/W, H/W) 구축 사업 추진(128백만원) : ‘13. 10 ~ ’14. 2

○ RFID게이트 설치, RFID태그 도입, RFID유물출납시스템 개발 등

□ RFID 인프라(S/W, H/W) 구축 사업 확대 추진(155백만원) : ‘14. 10 ~ ’15. 2

○ 게이트 추가 설치, CCTV통합관제 시스템 구축, 보안 유리문 설치 등

□ RFID 인프라 운영         : ‘14. 3 ~

작 성 자	경영지원부장 임원빈 ☎ 02-724-0105 과장 박관현 ☎ 0130 담당 : 강상범 ☎ 0126

3		사업계획(안)

□ 사 업 명 : 서울역사박물관 은평수장고 RFID인프라 구축 용역

□ 사업기간 : 계약일로부터 90일 이내

□ 소요예산 : 179,390천원

□ 사업범위

○ RFID인프라 하드웨어(H/W) 장비 도입

○ RFID인프라(H/W) 설치공사

○ RFID유물출납시스템(S/W) 재개발

□ 주요 사업내용

○ RFID인프라 하드웨어(H/W) 장비 도입

- 수장고 내부(목가구실·토도류실,전실,홀)

· RFID게이트, 휴대형 리더기, 터치패널PC, 태그발행기기 등 도입

- 수장고 외부(TPS실)

· 서버, 네트워크스위치, UPS, KVM스위치 등

※ 도입 상세내역 : 별첨

○ RFID인프라(H/W) 설치공사

- RFID게이트 구조물 설치(리더기, 안테나, 경광등, 터치패널PC 포함)

- 전원케이블 단말처리, 무선AP 및 UPS설치 등

○ RFID기반 유물출납시스템(S/W) 재개발

- 서울역사유물관리시스템과 유물 출납 정보 연계

- 은평수장고 출입인원 모니터링 환경 구축

- 유물 반입, 반출 처리 및 이력관리 기능

□ 시스템 구성도

○ 하드웨어(H/W)

○ 소프트웨어(H/W)

4		소요예산 및 추진일정

□ 소요예산 : 179,390천원

구 분	금액(천원)	소 요 내 역	비 고
전산개발비	58,390	- RFID유물출납관리 시스템 구현 - 서울역사유물관리시스템 연계	제한경쟁(협상에 의한계약) (제한사항 : 중소기업자)
자산및물품취득비	81,000	- RFID리더기, 서버, 태그발행기기등 인프라(H/W) 도입
시설비	40,000	- 전기공사, 네트워크 공사

□ 예산과목

○ 역사와 문화의 복합공간 창조, 소장유물 확보 및 보존, 은평수장고 조성, 전산개발비(207-02), 시설비(401-01), 자산및물품취득비(405-01)

□ 추진일정

❍ 사업 발주 및 사업자 선정 : 2018. 8 ~ 9

❍ 계약 체결 및 사업수행 : 2018.10 ~ 12

절차		제안요청서 검토 ‧계약심사 (8.2~8.14)			사업시행 및 입찰공고 8.14~9.4		제안서 접수 ~9.4		제안서평가 (9.7~9.12)		협상자 선정․협상 (9.13~9.19)		계약체결 (9.20~9.28)
내용		·제안요청서 14일 ·계약심사 10일			·입찰공고:10일		·정량적평가		·위원회 구성 ·정성적평가		·기간:10일이내		·사업자선정

5		기대효과

❍ 은평수장고 내 RFID인프라 구축으로 유물 출납업무의 효율성 향상

❍ 수장고 유물 및 출입 인원에 대한 모니터링 체계 구축으로 보안 관리 강화

별첨1

하드웨어 장비 도입 내역

설치장소	품 목	용 도	단위	수량	비 고
수장고	고정형RFID리더	유물태그, 사용자태그, 위치태그 인식	개	6	장소당 2개
	경광등	유물 무단반출 시 알림기능	개	3	장소당 1개
	고정형RFID안테나	태그 인식	개	12	장소당 4개
	RFID 게이트 구조물	리더기, 경광등, 안테나, 센서 탑재	개	6	장소당 2개
	포토센서(적외선)	반입, 반출 여부 구분	식	6	장소당 2세트
	터치패널PC	유물 반출입 처리(미인식 유물 처리 포함), 사용자 유출입 모니터링	개	3	장소당 1개
	노트북	태그 발행기와 연결 및 이동형 카트 탑재	개	1
	휴대형 RFID리더	메탈 태그, 사용자태그 정보 입력, 유물 반출입 처리, 태그정보 확인	개	2
	RFID태그 발행기	라벨 태그 발행	개	2
	이동형카트	노트북, 휴대형 RFID리더기, 태그발행기기 탑재	개	1
	무선 AP	휴대형 RFID리더기, 노트북에서 네트워크 연결	개	7
TPS실	미들웨어 서버	RFID리더기, 유물관리웹서버와 연결하여 유물 태그 인식 정보 처리	식	1
	네트워크 스위치(L2)	무선AP, 터치패널PC, 서버 등 네트워크 물리적 연결	식	1
	UPS	정전 시 전원 임시 공급	개	1
	KVM스위치	서버 작동(모니터, 키보드, 마우스 역할)	개	1
사무실	그래픽전문가용모니터 (맥프로데스크탑연결용)	고해상도 유물 이미지 조회, 편집 등	대	1
	이동형 스토리지 케이스	유물 정보(이미지, 영상 등) 대외 수집을 위한 스토리지 운반	개	1

돌아가기