부  의  안

1. 제안부서 : 도시공간사업본부 도시조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ 의안 제1호 -「항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계 반영 검토」
항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 1,558,975천원(부가세 및 지급자재비(8,375천원) 포함)

○ 의안 제2호 -「항동지구 내 역곡천 하천사면 차수매트 보완시공 검토」
항동지구 내 역곡천 제방안정성 검토결과에 따른 차수매트 보완시공에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 196,200천원(부가세 포함)

○ 의안 제3호 -「항동지구 내 안전시설 설치비 등 반영 검토」
항동지구 내 기존 서해안로 확장공사를 위한 교통안전시설물 설치 및 굴착공사 시 기존 지하매설물 보호 등을 위한 안전관리비 계상에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 88,431천원(부가세 포함)

4. 심사․의결사항 : 설계변경 타당성 등

※ 의안 제1호의 신규품목에 대한 계약심사부 기술심사 검토내용 조치결과 계약금액 조정 없음 통보[도시조성부-3168호(2018.06.27.)]

의안 제2호의 신규품목에 대한 계약심사부 기술심사 검토결과 의견 없음 통보[계약심사부-1444호(2018.05.18.)]

의안 제3호의 신규품목에 대한 계약심사부 기술심사 검토결과 의견 없음 통보[계약심사부-2257호(2018.08.03.)]

5. 붙임

1) 부의안 설명서 각 1부.

2018년  08월  03일

제 안 자 : 도시공간사업본부 도시조성부 토목3급  설 재 훈  □

도시공간사업본부 도시조성부 토목5급  김 견 영  □

의안 - 1

항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계 반영 검토

항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계에 대하여 다음과 같이 반영 검토코자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 서울항동 공공주택지구 조성공사

○ 공사기간 : 2016.10.27. ~ 2018.11.03.

○ 도 급 사 : 새천년종합건설㈜ 외 1개사

○ 도 급 액 : 25,010 백만원

Ⅱ		관 련 근 거

○ 2017.05.30. : 항동공공주택지구 조성공사 설계변경도서 송부(택지설계부-1464호)

- 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계

Ⅲ		현황 및 문제점

○ 항동지구 내 설치계획인 서해안로 횡단관로 총 7개소(우수2, 오수2, 상수3)에 대하여 당초 설계상 개착식 공법으로 반영되었으나, 기존 공용도로인 서해안로 특성상 교통흐름 저해에 따른 개착식 공법 적용이 여러움에 따라 비개착식 공법으로의 변경이 필요한 실정임.

Ⅳ		검 토 내 용

○ 상기 현황 및 문제점에 따라, 비개착식 추진공법으로 추가 설계된 서해안로 횡단관로 추진공사에 대하여 검토 반영하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 공사 주요 물량 검토

품 명		단위	수 량				비고
			당초	변경	증감
1. 구조물 추진공사
1) 우수관로 D21	D1500mm,흄관,L=26.50m	식	-	1	증)	1
2) 우수관로 D30	D1350mm,흄관,L=33.50m	식	-	1	증)	1
3) 오수관로 OA115	D300mm,PE,L=35.20m	식	-	1	증)	1
4) 오수관로 OB105	D300mm,PE,L=35.60m	식	-	1	증)	1
5) 상수관로 #11	D200mm,주철,L=34.50m	식	-	1	증)	1
6) 상수관로 #15	D300mm,주철,L=35.90m	식	-	1	증)	1
7) 상수관로 #27	D300mm,주철,L=35.90m	식	-	1	증)	1

○ 단가 검토

- 신규공종 : 협의율 적용[100+75.46]/2=87.73%]

※ 계약심사부-1657호(2018.06.12.) : 기술심사 검토결과 통보

도시조성부-3168호(2018.06.27.) : 조치결과 회신(계약금액 조정 없음)

○ 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	-	1,139,370	증) 1,139,370
제잡비 및 부가세	-	411,230	증) 411,230
도 급 액	-	1,550,600	증) 1,550,600
지급자재	-	8,375	증) 8,375
총공사비	-	1,558,975	증) 1,558,975

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 검토내용에 대하여 설계변경심사위원회 심의 의결 결과에 따라 추후 설계 변경 시 정산 ․ 반영

의안 - 2

항동지구 내 역곡천 하천사면 차수매트 보완시공 검토

항동지구 내 역곡천 제방안정성 검토결과에 따른 차수매트 보완시공에 대하여 다음과 같이 검토코자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 서울항동 공공주택지구 조성공사

○ 공사기간 : 2016.10.27. ~ 2018.11.03.

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

○ 도 급 사 : 새천년종합건설㈜ 외 1개사

○ 도 급 액 : 25,010 백만원

Ⅱ		관 련 근 거

○ 2017.12.19. : 하천사면 안정성 사전검토 필요 의견(재난안전부 현장점검시)

○ 2017.12. ~ 2018.04. : 역곡천 사면 안정성 검토(도시설계부)

○ 2018.04.06. : 역곡천 하천사면 차수매트 보완시공 검토지시(도시조성부→건설사업관리단)

- 우기 도래 전 하천 수방대비를 위한 설계사 하천사면 안정성 중간검토 결과를 반영한 차수매트 우선 시공 검토 지시

○ 2018.04.24. : 역곡천 차수매트 설치 실정보고(건설사업관리단→도시조성부)

○ 2018.05.31. : 항동지구 역곡천 제방안정성 검토결과 송부(도시설계부→도시조성부)

Ⅲ		현황 및 문제점

○ 우리공사 재난안전부 현장점검(2017.12.19.)시 역곡천 하천사면 안정성에 대한 추가검토가 필요한 것으로 의견 제시되어 설계부서에 요청하여 하천사면 안정성에 대하여 검토한 결과,

○ 제방 내 침투수 발생에 의한 수위 급강하시 제방안전율이 급격히 낮아짐에 따른, 제방 내 침투수 방지를 위한 차수매트 보완시공이 필요한 실정임.

Ⅳ		검 토 내 용

○ 하천 제방안정성 검토결과에 따라, 항동지구 내 역곡천 하천사면에 대한 차수매트 보완시공에 대하여 검토 반영하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 공사 주요 물량 검토

품 명		단위	수 량				비고
			당초	변경	증감
차수시트부설(HDPE)	T=1.5mm	m2	-	15,942	증)	15,942

○ 단가 검토

- 신규공종 : 협의율 적용[100+75.46]/2=87.73%]

※ 계약심사부-1444호(2018.05.18)로 기술심사 완료(별도의견 없음)

○ 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	-	151,528	증) 151,528
제잡비 및 부가세	-	44,672	증) 44,672
도 급 액	-	196,200	증) 196,200
지급자재	-	-	-
총공사비	-	196,200	증) 196,200

Ⅴ		조 치 계 획

○ 하천공사 특성상 우기 도래 전에 수방대비를 위한 하천 사면공사를 마무리 지어야함에 따라 설계사로부터 하천 제방안정성에 대한 중간 검토결과를 받아 하천사면에 대한 차수매트 선 시공 조치를 하였으며,

○ 상기 검토내용에 대하여 설계변경심사위원회 심의 의결 결과에 따라 추후 설계 변경 시 정산 ․ 반영

의안 - 3

항동지구 내 안전시설 설치비 등 반영 검토

항동지구 택지조성공사 중 사업지구 내 기존 서해안로 확장공사를 위한 교통안전시설물 설치 및 굴착공사 시 기존 지하매설물 보호 등을 위한 안전시설 설치비 등 계상에 대하여 다음과 같이 검토 반영코자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 서울항동 공공주택지구 조성공사

○ 공사기간 : 2016.10.27. ~ 2018.11.03.

○ 도 급 사 : 새천년종합건설㈜ 외 1개사

○ 도 급 액 : 25,010 백만원

Ⅱ		관 련 근 거

○  건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)

- 근로자의 안전이 아닌 원활한 공사수행을 위한 사업장 주변 교통, 환경정리 목적의 인건비 및 시설물 설치비는 사용이 불가함.

○ 건설기술진흥법 제63조(안전관리비용) ①건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하“안전관리비”라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제60조(안전관리비) ①법제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다.

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용비용

6. 법제62조제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 획인에 필요한 비용

Ⅲ		검 토 내 용

○ ⌜항동공공주택지구 조성공사⌟ 설계내역서 상 ‘산업안전보건법’에 의한 산업안전보건관리비가 계상되어 있으나, 관련법 상 산업안전보건관리비로는 근로자의 안전이 아닌 원활한 공사수행을 위한 공사장 주변 교통, 환경정리 목적의 인건비 및 시설물 설치비는 사용이 불가함.

○ 이에 따라, 항동지구 내 기존 공용도로인 서해안로 확장공사 수행 중 기존도로와 공사구간 분리를 위한 교통안전시설물 설치/유지관리 및 지하터파기 공사 중 기존 지하매설물(도시가스,상수관로 등) 보호 조치를 위한 안전관리비를 별도 계상하여 공사장 안전관리에 만전을 기하고자 함.

○ 안전관리비 계상 검토(건설공사 안전관리 업무수행 지침에 의거하여 산정)

구 분	세 부 항 목	계상금액(원)	비 고
계		80,391,544	부가세 별도
1. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용	⦁지하매설물 보호조치 비용 - 기존관매달기(재이용수, 상수관, 하수관 등) - 부대철골 설치(10ton) x 634,937원	6,349,370
2. 공사장 주변의 통행안전 및 교통 소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용	⦁공사시행중의 통행안전 및 교통 소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용 - 보통인부 1인(109,819원) × 22일 × 5개월 - PE드럼(21,000원) x 138EA (서해안로1.1kmx2(양측)=2,200m, C.T.C=2.0m) - PE방호벽(145,000원) x 229EA (서해안로1.1kmx2(양측)÷8구역 =275m, L=1.2m)	74,042,174

※ 세부 집행계획 별첨 자료 참조

○ 단가 검토

- 계약심사부-2257호(2018.08.03.)로 기술심사 완료(별도의견 없음)

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기 검토내용에 대하여 설계변경심사위원회 심의 의결 결과에 따라 추후 설계 변경 시 정산 ․ 반영