의  결  안

제 2018-2회 위 원 회
년 월 일	2018년 08월 08일	의안번호	제2호
의 제	항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계 반영 검토 외 2건

1. 제안부서 : 도시공간사업본부 도시조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ 의안 제1호 -「항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계 반영 검토」
항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 1,558,975천원(부가세 및 지급자재비(8,375천원) 포함)

○ 의안 제2호 -「항동지구 내 역곡천 하천사면 차수매트 보완시공 검토」
항동지구 내 역곡천 제방안정성 검토결과에 따른 차수매트 보완시공에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 196,200천원(부가세 포함)

○ 의안 제3호 -「항동지구 내 안전시설 설치비 등 반영 검토」
항동지구 내 기존 서해안로 확장공사를 위한 교통안전시설물 설치 및 굴착공사 시 기존 지하매설물 보호 등을 위한 안전관리비 계상에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 88,431천원(부가세 포함)

4. 심사․의결사항 : 설계변경 타당성 등

※ 의안 제1호의 신규품목에 대한 계약심사부 기술심사 검토내용 조치결과 계약금액 조정 없음 통보[도시조성부-3168호(2018.06.27.)]

의안 제2호의 신규품목에 대한 계약심사부 기술심사 검토결과 의견 없음 통보[계약심사부-1444호(2018.05.18.)]

의안 제3호의 신규품목에 대한 계약심사부 기술심사 검토결과 의견 없음 통보[계약심사부-2257호(2018.08.03.)]

제2018-2회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사․의결 하였음.

2018년  08월  08일

위 원 장 :	도시공간사업본부	본부장	김 소 겸	□
부위원장 :	도시공간사업본부	도시공간사업처장	박 광 균	□
위 원 :	도시공간사업본부	도시공간기획부	최 칠 문	□
위 원 :		도시설계부	이 상 협	□
위 원 :		기반시설부	노 병 철	□
위 원 :		도시개발계획부	고 재 영	□
위 원 :	경영지원본부	계약심사부	한 일 현	□
위 원 :	기획조정실	재정관리부	이 태 종	□
위 원 :		예산자금부	민 동 조	□

제 2018-2회 위원회 서면 결의서

의  제 : 항동지구 지구 외 차집관로 부설공사 추가 설계 반영 검토 외 2건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 항동지구 내 서해안로 횡단관로 추진공사 추가 설계 반영 검토 외 2건에 대한 설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위 원 장	김 소 겸
부위원장	박 광 균
위 원	최 칠 문
위 원	이 상 협
위 원	노 병 철
위 원	고 재 영
위 원	한 일 현
위 원	이 태 종
위 원	민 동 조

2018년  08월  08일

위  원  장           김  소  겸    □