문서번호	시설보수과-6576
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		신동헌	08/20 이학구
협조
	주무관		최지락

퇴계로지하차도 보수공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

서부도로사업소

시설보수과

퇴계로지하차도 보수공사 실정보고

퇴계로지하차도에 대한 보수공사 시행중 BOX 구간 기둥 하부 콘크리트의 손상이 심한 상태로 내구성 확보 및 미관제고를 위하여 추가보수가 필요한 사항으로 이에 대한 실정보고임.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2018년 퇴계로지하차도 보수공사

○ 공사기간: 2018. 5. 15.~2018. 12. 20.

○ 공사개요: 타일내오염도장1,608㎡, 콘크리트표면보수 256㎡, 그림타일 54㎡ 등

○ 도 급 자: (주)에이치씨티이건설 대표 최진석

○ 도 급 비: 227,513천원

□ 보고내용

○ 퇴계로지하차도 BOX 구간 기둥하부 연석부는 동절기 제설재 살포 등에 의해 직접적으로 노출되는 부분으로 전반적인 콘크리트 열화, 파손이 발생되어 시설물 내구성 확보를 위해 보수가 필요한 실정임.

*	*
********************

○ 또한, 퇴계로 지하차도에 대한 전면부 그림타일 및 타일 내오염도장 실시로 전체적인 지하차도 환경개선이 이루어졌으나, 일부구간의 콘크리트가 파손이 심한 상태로 미관을 해치고 있어 미관제고를 위해 금회보수가 꼭 필요한 실정임.

타일 내오염도장 완료	콘크리트 표면보수 완료

□ 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 시설물 내구성 확보 및 미관제고를 위하여 우선 도급자로하여금 공사시행토록 하고 추후 설계변경시 정산코자 하며,

- 소요예산(32백만원)

· ********************

보수물량 : ***************

○ 추가로 소요되는 예산에 대하여는 낙찰차액 및 이설비 등 가용가능예산과 보험료 정산액을 활용하여 예산범위내에서 시행

- 가용가능예산 현황

(단위:천원)

재배정예산	계약금액	가용가능예산
		계	낙찰차액	집행잔액
262,700	227,513	35,187	32,487	2,700

끝.