문서번호	은평병원원무과-7441
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
최혁진	이종민	오세양		05/22 남민
협 조
	간호과장		박동림
	약제과장		조경숙
	진료부장		이순정

환자중심의 의료서비스 제공 및 직원 복지증진을 위한

청사내부 공간 재배치 및 리모델링 추진 계획(안)

2014. 5

서울특별시은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

환자중심의 의료서비스 제공 및 직원 복지증진을 위한

청사내부 공간 재배치 및 리모델링 추진 계획(안)

낮병동 입원환자들에 대한 의료서비스 만족도 향상 및 병원근무자들의 시설이용 편의 증진을 위한 공간 재배치 및 리모델링을 추진하고자 함

Ⅰ

추진근거 및 경과

□ 추진근거

○ 2014년 청사관리업무 추진 계획(병원장방침, 원무과-1034호, 2014.1.23.)

○ 낮병동 리모델링 계획 수립을 위한 의견 제출 요청(원무과-2044호, 2014.2.12.)

□ 추진경과

○ 2014년 청사개선 기본계획 및 예산 집행계획 수립 : 2014. 1

○ 지하1층 낮병동 공간 활용 방안 수요조사 및 검토 : 2014. 2 ~ 3

○ 공간 재배치 및 리모델링 관련 부서별 의견 조율(협의) : 2014. 4 ~ 5

Ⅱ

추 진 개 요

□ 추진방향

○ 낮병동 입원환자의 치료효과 중대 및 시설이용 만족도 향상을 위한 리모델링

추진(공간구성, 컬러디자인 등)

○ 각종 규정 및 기준에 부합하는 공간 재배치(면적할당, 위치선정 등)

○ 사업추진 단계별(설계, 공사, 구매) 적정한 계약방법 선정

○ 설계변경 최소화를 위한 관계부서(병원내부, 본청) 사전협의 철저

○ 유니버설 디자인 적용으로 시설이용자(환자 및 보호자, 직원 등) 편의 증진

□ 사업내용

○ 사 업 명 : 청사내부 공간 재배치 및 리모델링 공사

○ 추진기간 : 2014. 5 ~ 10

○ 추진범위 : 지하1층 낮병동 내부, 지상2,6층

○ 추진내용

- 낮병동 리모델링

구분	전	후	비고
낮병동	면담실	간호과물품보관창고
	컴퓨터교육실	강의실,컴퓨터교육실	정신보건간호사수련과정
	도서실	변동없음
	비만클리닉	통합락커룸	남녀구분,탈의공간포함
	운동치료실	컨퍼런스룸, 통합사무실
	보호작업장	복도	실내워킹트랙
	간호사실(N.S)	복도(철거)	이전
	화장실,샤워실	변동없음	내부 보수
	주방	변동없음	〃
	집단치료실1,2,데이룸	변동없음	통합 중앙배치

- 공간재배치

구분	전	후	비고
6층	보호사 휴게실	준공무직 여직원휴게실	청소, 경비근로자
	여직원 휴게실	감염관리실
2층	감염관리실	여직원 휴게실	수유실 포함
	공조실	보호사 휴게실	항온항습기 철거
지하1층	문서고	의무기록실(사무실)
	안치실	문서고
	남성청소근로자휴게실	변동없음	청소물품 이동, 내부보수
	여성청소근로자휴게실	사회복무요원 휴게실	내부보수

○ 소요예산 : 170,000천원

- 예산산출내역 : 설계용역 20,000천원, 공사 100,000천원, 물품구매 50,000천원

- 예산과목 : 은평병원 원무과, 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진,

은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 시설비 및 부대비(401-01)

Ⅲ

세부추진계획

□ 실시설계용역

○ 용역개요

- 용 역 명 : 은평병원 청사내부 공간 재배치 및 리모델링 공사 설계 용역

- 설계범위 : 지하1, 지상2,6층

- 용역기간 : 착수일로부터 45일

- 소요예산 : 20,000천원

○ 계약방법 : 수의계약

- 사유 : 전문설계(내부디자인 포함)를 통한 공사추진을 위해 관련 설계

용역 경험이 풍부하고, 저렴한 견적을 제출한 업체

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

□ 낮병동 내부 리모델링 공사

○ 공사내용

- 집단치료실 통합 및 중앙배치

- 간호사실(N.S) 이전

- 실내 운동치료를 위한 걷기트랙 시공(바닥재 검토)

- 주방 및 화장실·샤워실 내부 인테리어 개선

- 기타 필요공간(창고, 강의실, 락커룸, 통합사무실 등) 배치

○ 평면도

※ 세부내용 : 별도계획 수립 시행

○ 공사기간 : 착공일로부터 60일 이내

○ 소요예산 : 70,000천원

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 소재지 제한(서울특별시), 면허 제한(전문공사 중 실내건축공사업)

※ 석면 철거 및 폐기 시 적법한 절차 준수

□ 공간재배치 인테리어 공사

○ 공사내용

- 지상6층 : 간호과 사무실 내부 칸막이 이동, 보호사 휴게실 내부 철거

및 재시공[청소근로환경시설 가이드라인(노동정책과, 2014.3) 준용]

- 지상2층 : 공조실 항온항습기 철거 및 내외부 인테리어 시공, 감염관리실

내부 환기시설 설치 및 가구배치(모유수유실)

- 지하1층 : 문서고 이전(안치실), 의무기록실 확장 후 천정 및 바닥재

교체(페인팅 포함), 여성청소근로자 휴게실 내외부 도장공사,

남성청소근로자 휴게실 내외부 도장공사

※ 유니버설디자인 적용 등에 따른 공간재배치(안) 변경 가능

○ 평 면 도

지상6층(여직원휴게실, 보호사휴게실)	지상2층(공조실, 감염관리실)

지하1층(의무기록실, 문서고, 안치실)	지하1층(청소근로자휴게실)

○ 공사기간 : 착공일로부터 30일 이내

○ 소요예산 : 30,000천원

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 소재지 제한(서울특별시), 면허 제한(전문공사 중 실내건축공사업)

※ 석면 철거 및 폐기 시 적법한 절차 준수

□ 물품구매

○ 구매내역

- 탈의실용 락커(번호키) : 보호사 50EA, 준공무직 29EA

- 준공무직 여직원휴게실 물품 : 냉장고, 세탁기, 싱크대 등

- 여직원휴게실(수유실) 물품 : 2층침대, 소파, 냉온수기, 전자렌지 등

- 컨퍼런스룸(사무실) OA가구 : 책상, 의자, 캐비넷 등

- 강의실 시청각 장비 : 빔프로젝터, 스크린, 앰프, 스피커 등

※ 세부내용 : 별도계획 수립 시행, 공간배치 변경 시 물품구매내역 변동 가능

○ 납품기간 : 계약일로부터 60일 이내

○ 소요예산 : 50,000천원

○ 계약방법 : 조달구매(3자단가계약)

- 조달청 3자단가 품목중 품질우수 제품 선정

□ 추진일정

○ 2014. 5. 15 ~ 5. 23 : 세부 추진계획 수립

○ 2014. 5. 26 ~ 6.  5 : 설계용역 계약

○ 2014. 6.  9 ~ 7. 31 : 실시설계 수행 및 공사,물품구매 발주

○ 2014. 8.  1 ~ 10. 31 : 공사시행, 물품구매 설치 및 준공

Ⅳ

행 정 사 항

□ 설계 및 공사시행을 위한 출입협조 : 전부서

□ 낮병동 리모델링 공사 중 환자퇴원(방학) 실시 : 진료부

□ 항온항습기 및 안치실 냉장고 불용처리 : 원무과(물품담당)

□ 공사중 안전관리 및 교육실시 : 원무과(안전관리담당 및 중앙감시실)