				★ ◎															본부장 방침 제422호
문서번호	도시환경부-2904			부 원					도시환경부장 직무대행					도시공간조성처장					도시공간사업본부장
보존기간	20년																						08/21
				서종인					안성택					황의필					김소겸
결재일자	2018.08.21
공개여부	공개			협조
일상감사	대상
								일상 감사		No.		794			감사					의견
										2018/08/21					김영준					의견없음
보조제목을 입력하는 곳
고덕강일1지구 매립폐기물 처리방안 보고
		서울주택도시공사
( 도시환경부 )

고덕강일1지구 매립폐기물 처리방안 보고

고덕강일1지구 택지조성공사 수행 중 유통판매시설2, 자족시설6, 중로2-2부지에서 매립폐기물이 발생하여 공사추진 및 용지공급에 차질이 없도록 조치코자 발생폐기물의 처리방안을 검토하여 보고드림

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 고덕강일1지구 건설폐기물(파쇄) 처리용역

○ 용역금액 : 1,798,620,000원

○ 용역업체 : 삼흥산업개발(주) 대표자 염태욱

○ 용역기간 : 2016.12.15. ~ 2019.11.29.

II		관련근거

○ 도시조성부-3626(2018.07.23)호 : 고덕강일 공공주택지구 조성공사 폐기물 반출 요청

III		현황 및 문제점

▢ 고덕강일1지구내 매립폐기물 발생

○ 고덕강일 공공주택지구 택지조성공사 중 고덕강일1지구 유통판매시설용지2, 자족시설용지6 및 중로2-2부지에서 매립폐기물(11,153톤)이 발생하여 이에 대한 처리가 필요한 실정임(붙임1 참고).

○ 고덕강일1지구내 자족시설용지6, 유통판매시설용지2는 올해 공급 예정되어 있어 일정에 차질없는 부지매각 및 중로2-2 조성공사의 원활한 진행을 위하여 발생된 매립폐기물의 조속한 반출이 필요한 실정임.

▢  매립폐기물 발생 현황

구 분	발 생 량					비 고
	부피(㎥)	비중(톤/㎥)	중량(톤)	성상(톤)
매립폐기물	6,971	1.6	11,153	폐토석(70%)	7,807
				혼합폐기물(30%)	3,345

※ 매립폐기물 성상은 발주시 기준 폐토석:혼합폐기물=7:3으로 분류함

IV		검토내용

▢  매립폐기물 처리방안 검토

○ 택지조성공사 후속공정 및 부지매각의 원활한 추진을 위하여 상기 발생된 매립폐기물을 기존계약업체로 하여금 처리토록하고 설계변경하고자 함.

▢  소요예산 : 378,188천원

(단위 : 천원)

구 분			기 정	변 경	증 감
총원가	공급가액	수집・운반비	417,720	487,398	69,677
		관리시설물 운영비	32,870	32,870	-
		중간처리비	1,089,894	1,349,392	259,497
	소계		1,540,484	1,869,660	329,174
	일반관리비(10%)		45,059	52,026	6,967
	이윤(10%)		49,564	57,228	7,664
계			1,635,109	1,978,916	343,807
부가가치세			163,510	197,891	34,380
도급비			1,798,620	2,176,808	378,188

※ 처리단가는 기존 계약단가 적용

Ⅴ		조치계획

○ 상기 검토내용과 같이 기계약업체인 삼흥산업개발(주)로 하여금 설계변경 시행하여 조속 처리하고 추후 실제 발생물량에 따라 정산조치하고자 함.

붙임  1. 고덕강일 공공주택지구 조성공사 매립폐기물 반출 요청

2. 매립폐기물 현황_고덕강일1지구(유통판매시설2, 자족시설6, 중로2-2)

3. 고덕강일 1지구 건설폐기물(파쇄)처리용역 변경내역서(매립추가).  끝.