도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (13차)

◉ KT 용산 데이터센터 신축 지중선로공사 : 조건부 시행

- 신축 지중선로의 형태가 사선 또는 곡선인 공사단계의 경우, 공사방법 및 장비배치 등을 재검토하여 점용구간 제원(배치도)을 제시하기 바람

- 1구간 2, 3단계 삼성아파트 방향 좌회전 여건을 확보하기 위해 심야시간대 신호주기 변경 등을 검토하기 바람

- 1구간 13단계 마포대교 방향 우회전 통행여건을 확보하기 위해 우회경로(독막길입구교차로)에 대한 안내체계를 수립하기 바람

- 2구간 15단계의 경우, 장비배치 및 방향 등을 재검토하여 교통소통대책을 보완하기 바람

- 마포대로 공사단계의 경우, 공사시간 변경(24시 시작)에 대해 검토하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람