문서번호	도로관리과-8023
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
허원회		김순수	05/22 최동필
협조
	주무관		홍현기

‘14년도 도로사면 보수보강 사업예산 재배정 검토

- 은평구 녹번동 산1-44일대 도로사면 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

‘14년도 도로사면 보수보강 사업예산 재배정 검토

현재 공사중인 『녹번동 산1-44일대 도로사면 보수・보강공사』에 대한 전문가 자문결과(‘14.4), 록볼트 등 보강이 필요하다는 의견을 반영하여 시행부서에서 예산(추가) 배정요구에 따라, 재난예방을 위한 예산 재배정 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 위치 : 은평구 녹번동 산1-44일대(산골고개 비탈면)

○ 규모 : 록볼트 20공, 낙석방지망 설치 3,749㎡, 숏크리트 타설 58㎥, 벌목 2,521㎡, 석축 설치 250m 등

○ 기  간 : ‘14.1.2 ~ ’14.6.30

○ 공사비 : 258,444,400원

○ 공정률 : 85%(‘14.5.20기준)

□ 추진경위

○ 외부전문가 자문결과(‘14.4.25, 도로관리과)

- 사면 좌측 계곡부 배수시설 추가설치 및 정비 필요

- 사면 좌측 계곡부 퇴적토 제거 후 저유속 저감시설 필요

- 사면 중앙부 상단의 석축옹벽 하단에 콘크리트 블록과 같은 형태의 보강시설 필요

- 사면 중앙부 상단 풍화구간에 록볼트 보강 및 침식방지 시설 필요

○ 보수·보강을 위한 예산지원 요청(‘14.5.19, 은평구)

- 요청 예산 : 24,895천원

- 주요공종 : 유속저감시설(H=0.6m, L=10m), 록볼트 설치 20공 등

□ 검토의견

○ 시행중에 있는 동 공사에 대한 특별 안전점검 결과(외부전문가, 자치구, 도로관리과)에 따라, 유속 저감시설, 록볼트 등 공종 추가 발생으로 사면 안전성 확보를 위하여 공사비(25백만원) 추가 배정 조치하는 것이 타당하다고 판단됨

- 설계내역서 : 별첨

□ 조치 계획

○ ’14년도 도로사면 보수․보강공사비 배정 조치 ⇒ 25백만원

○ 예산 재배정 내역

(단위 : 원)

예산 구분	기관별	사 업 명	예산액	기 배정액	금회배정액	배정잔액
계	7개기관	7개 사업	2,894,000,000	1,732,046,290	25,000,000	1,136,953,710
도로 사면	강서도로사업소	증미산 도로사면 공사		397,296,200	-
	종로구	삼청로길 도로사면 보수・보강공사		520,000,000	-
	강북구	월계로 옹벽 보수・보강공사		314,765,690	-
	구로구	오류동 도로옹벽 보수・보강공사		130,000,000	-
	은평구	녹번동 산1-44번지 일대 도로사면 보수보강공사		328,444,400	25,000,000
	서초구	반포동 누에다리 보도육교 비탈면 정밀안전진단		41,540,000	-

○ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로사면 붕괴예방을 위한 보수․보강, 시설비 및 부대비(시설비)

□ 행정사항

○ 배정예산은 사업목적(규모 등)에 적합하도록 공사 시행

○ 도로사면 보수・보강사업은 공사완료(5월 30일) 조치

붙임 : 현황사진 1부.  끝.