준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

○ 용 역 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간: 2017. 9. 20. ～ 2018. 8. 31.

○ 계약금액: 442,000,000원

○ 계약업체: ㈜동해종합기술공사

2. 준공기한 연기

○ 준공기한

- 당초: 2017. 9. 20. ~ 2018. 8. 31.

- 변경: 2017. 9. 20. ~ 2018. 10. 31.

○ 귀책사유: 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부: 미 부과

○ 연기사유

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선계획과 연계된 행정절차(교통안전시설, 건설기술심의 등)가 지연됨에 따라 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하고자 함.

2018. 8.

역사도심재생과장  양 병 현 (인)

서울특별시 경리관 귀하