문서번호	도로보수과-4581
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
이문희		김유찬	08/28 송만규
협조
	주무관		송광석

가로변 버스정류장 물고임 조사결과 및 정비계획 보고

2018. 8.

동부도로사업소

[도로보수과]

가로변 버스정류장 물고임 조사결과 및 정비계획 보고

강우 시 물 고임이 발생하는 가로변 버스정류장 구간에 대하여 일제 조사를 완료하고 정비계획을 수립하여 시민 불편을 해소코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 도로관리과-10831호(‘18.7.20.) : 가로변 버스정류장 주변 도로 물 고임 일제조사 시행

□ 추진배경 : 제282호 임시회 지적사항(도시안전건설위원회 홍성룡 의원)

- 강우 시 도로 물 고임으로 버스정류장 이용 시민이 불편을 겪고 있으니 조치 요구(7.13. 주요업무보고 시 질의)

□ 도로보수과-3972호(‘18.7.26.) : 가로변 버스정류장 물고임 일제조사 및 정비계획

Ⅱ		조사결과

□ 조사대상 : 관내 시(市)도 버스정류장 775개소

□ 조사기간 : 2018. 7. 25. ~ 8. 20.

□ 조사내용 : 가로변 버스정류장 도로 물 고임 발생 여부

□ 노선별 조사결과

연번	노선	개수	연번	노선	개수	연번	노선	개수
1	남부순환로	3	7	삼전로	5	13	오금로	13
2	논현로	2	8	상일로	3	14	올림픽로	3
3	도곡로	2	9	송파대로	1	15	중대로	4
4	도산대로	1	10	압구정로	1	16	천호대로	4
5	동남로	4	11	학동로	1	17	테헤란로	2
6	문정로	2	12	헌릉로	1
합계	17노선	52

□ 물고임 발생 사유

연번	원 인	건 수	비고
1	소성변형	17
2	도로침하 및 균열	15
3	측구불량	20
계		52

Ⅲ		정비계획

□ 정비기간 : 2018. 8. 21. ~ 9. 30.

□ 정비방법 : 정비 규모에 따라 사업소 공무직(기동반) 또는 포장도로 긴급복구 업체 활용하여 정비 시행

□ 정비계획

연번	정비계획	건 수	비고
1	공무직(기동반) 복구	6
2	포장도로 긴급복구 업체 정비	25
3	구청이첩(측구불량)	20
4	굴착복구공사 시행후 차로단위복구	1
계		52

Ⅳ		행정사항

□ 2018. 8. 21. : 조사결과 보고(시 도로관리과)

□ 2018. 9. 30. : 정비결과 보고(시 도로관리과)

붙임 : 조사 보고 서식 1부.  끝