문서번호	교량보수과-3300
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
백운경		구현모	05/23 김만수
협조
	주무관		정상모

「두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역」

예산변경 사용 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

서부도로사업소

(교량보수과)

「두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역」

예산변경 사용 검토 보고

‘14년도 홍제천고가교(성산1,2-1,4램프) 내진성능개선공사의 안전하고 효율적인 공사관리를 위해 기 시행 중인 책임감리용역에 상기 공사의 감리과업을 포함 시행하여 용역비를 절감하고 추가 과업을 위한 과업기간 연장에 따른 소요예산 확보 방안을 보고드림

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역

용역기간 : 2013. 6.12 ~ 2014. 7.11

용 역 비 : 358,153천원

용 역 사 : (주) 신명건설기술공사

Ⅱ		추진경위

2013. 4. 08 : 내진성능개선공사 책임감리 시행계획

2013. 4. 10 : 감리용역 발주

2013. 6. 12 : 감리용역 착수

2014. 1. 09 : 동절기 공사중지에 따른 감리원 철수

- 기간 : 2014. 1.18 ~ 2014. 2.28

- 공사일시중지에 따른 감리준공기한 조정

․ 2014. 7. 11 → 2014. 8. 22

2014. 4. 29 : 홍제천고가교(성산1,2-1,4램프) 내진성능개선공사 발주

Ⅲ		문제점

강변북로(두모교) 및 내부순환로(홍제천고가교)상 1종 시설물의 내진성능개선을 위한 면진받침교체공사를 시행함에 있어, 고난도의 기술력과 안전하고 엄격한 현장관리가 필요하여 책임감리로 공사관리 중이나,

내진보강공사 추가 발주로 인하여 책임감리용역비 부족

○ 추가 소요 사업비 : 151,847천원(과업기간연장 5개월:2015.1.22.)

※ 별도 책임감리용역 신규발주시 추가사업비 281,700천원 소요

Ⅳ		검토의견

원활한 사업추진을 위해 기 시행중인 책임감리용역에 상기 공사의 감리과업 추가 및 준공기한을 연기하고자 하며,

추가 소요 사업비확보를 위해 2014년도 홍제천고가교 내진성능개선 사업비(시설비) 일부를 감리비로 변경 사용하고자 함.

내진보강 예산 사업비 변경내역

- 당초: 시설비 ⇒ 감리비(통계목 변경)

(단위 : 백만원)

예산과목					당 초 예산액	변 경		변경후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
도로시설 관리	자동차전용도로교량관리	내부순환로내진보강	시설비 및 부대비	시설비	2,000	-	152	1,848
				감리비	-	152	-	152

Ⅴ		행정사항

도로시설과에 예산과목 변경요청

「두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역」 설계변경 및 준공기한 연기조치.

붙임 : 내역서(변경) 1부. 끝.