투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	강남순환 8공구 전면책임감리용역 설계변경(12차 2회) 계약 의뢰

우리 본부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 전면책임감리용역』에 대하여 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 전면책임감리용역

나. 용 역 비 : 금15,797,000천원 (12차: 860,000천원)

다. 용역기간 : ’02. 12. 31.~’22. 12. 31. (12차: ’18. 1. 1.~’18.12.31.)

라. 용역업체 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소  대표 신완수

마. 설계변경 내역(12차 2회)

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증･감
용 역 비	전 체	15,797,000	15,797,000	-
	금회(12차)	860,000	1,460,000	증)600,000

바. 설계변경 사유

- 양재대로 구조개선사업(대모지하차도) 착수에 따른 건설사업관리기술자 추가 투입 반영, 물가변동으로 인한 계약금액조정 반영

사. 예산과목

- 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계),

강남순환도시고속도로건설, 시설비및부대비, 감리비

- 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계),

양재대로 구조개선, 시설비및부대비, 감리비

붙임  1. 설계변경(12차 2회) 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(12차 2회) 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	토목부장
주무관	박운용		도시고속도로과장	명경출		토목부장	09/06 김영수
협조자	주무관	김구		경리과장	이현숙
시행	토목부-15605	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-8662	/전송	02-3708-2599	/	parktiger93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)