문서번호	산지방재과-8996
결재일자	2018.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면총괄팀장	산지방재과장
임병관		이정환	09/12 代이정환
협조

2018년 하반기

우면산 산사태 복구공사 하자검사 계획

2018.  9.

- 2018년 하반기 -

우면산 산사태 복구공사 하자검사 계획

우면산 산사태 복구공사(1~3공구)에 대한 2018년 하반기 하자검사를 실시하여 사방시설물 관리에 만전을 기하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 우면산 산사태 복구공사(1~3공구)와 경관복원공사

○ 공사기간 : 2011.12.22.~2012.12.14. , 2017.7.10.~2017.10.31.

○ 공사내역

구 분	위 치	규 모	공사비(천원)	시 공 사
1공구	래미안, 임광아파트 앞, 전원마을	17.1ha	8,514,105	동부산림경영센터(강릉)
3공구	생태연못, 형촌마을	8ha	3,445,478	남부산림경영센터(안동)
경관복원	우면산 산사태 복구지	1식	208,613	회암조경(주)

하자기간 : 준공검사일로부터 공종별 2~7년

공 종 별	하자보증년수
	1공구 (’12.12.14 준공)	3공구 (’12.10.31 준공)	경관복원공사
Con'c사방댐, 역T형, 중력식	'12.12.28~'19.12.27(7년)	'12.11.01~'19.10.31(7년)	-
나무식재공 등	-	-	'17.11.09~'19.11.08(2년)

※ 조경공(2년, ’14년 12월),구조물공 및 2공구는 하자보증기간 종료

하자검사 계획

○ 검사기간 : ’18. 9. 19. ~ 10. 05.

○ 검사내용

- 사방시설물 변형 및 파손 여부, 배수시설의 배수기능 유지 여부

- 구조물의 기능성, 주변부 세굴가능성, 마감부 및 이음새 등 하자여부

- 옹벽, 석축 파손, 손상, 균열 발생 여부 등

○ 검사자 :

- 산지방재과 : 녹지6급 곽문수, 시설6급 임병관

- 서 초 구 청 : 녹지6급 백종철 외 1명

○ 추진일정

‘18.  9. 19 ~ 10. 05 : 하자검사

‘18. 10. 08 ~ 10. 12 : 하자통보 및 착수

‘18. 10. 15 ~ 10. 31 : 하자조치 및 준공

※ 점검일정은 사방시설유지관리사업 점검일정 및 우천 등을 감안 점검 기간 내            자체 조정하여 시행하고 자치구 담당자 및 시공사 관계자 참여 합동검사 실시

행정사항

○ 사방댐 등 일부 공종의 하자기간 미도래에 따라 자치구 합동검사 실시

○ 현장 점검시 시공사 관계자 참여토록 조치

○ 하자발생 시설은 시공사에 하자보수 통보 및 조치

붙임 1. 대상시설 목록(1~3공구) 각 1부.

2. 하자검사 조서 양식 1부. 끝.