문서번호	시설보수과-7386
결재일자	2018.9.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		신동헌	09/13 이학구
협조
	주무관		최지락

증산교 성능개선공사에 따른 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9

서부도로사업소

시설보수과

증산교 성능개선공사에 따른 실정보고

증산교에 대한 성능개선공사 시행중 상부 보도구간(화단조성) 누수에 따른 방수 필요 및 하부 가설비계 수량이 일부 누락되어 있는 바, 이에 대한 실정보고임.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2018년 증산교 성능개선공사

○ 공사기간 : 2018. 8. 8.~2018. 12. 31.

○ 공사개요 : 단면복구 벽체 T=30mm 104.25㎡, 단면복구 천정 T= 30mm 1,686㎡, 철근노출 단면복구 천정 480㎡, 기둥보강 144㎡ 등

○ 도 급 자 : ㈜두항엔지니어링 대표 엄진욱

○ 도 급 비 : 743,866천원

□ 보고내용

1. 2017년 전차 정밀점검 결과에 의하면 바닥판 점검결과 상부 보도부 화단에서 장기간에 걸쳐 유입되는 노면수에 의하여 콘크리트 박리와 백태가 발생된 상태로 화단 철거가 필요하다고 판단되며 보도부 방수 및 재포장을 미실시시 하부 보강효과 저하등이 예상되나 금번 공사에는 제외되어 있음.

보도부 화단 노면수 유입 으로 박리 백태 발생

2. 당초 설계시 설계도면에 가설비계 수량이 단위당수량(237.24㎡)과 총계 수량(237.24×35m=8,303.4㎡)이 산출기록되어 있으나 설계서 수량 입력시 단위당(㎡) 수량으로 착오기입되어 변경이 필요한 필요한 실정임.

적용수량 : 단위당 수량적용(237㎡)	실설치수량 237×35m(폭) ≒ 8,303㎡

□ 문 제 점

1. 당초 교량안전과에서 용역시(증산교등 3개소 성능개선공사 실시설계용역) 상부에 대한 보수를 시행토록 계획되어 있었으나 재하시험결과 DB-24이상(DB-31) 상회하여 하부보강만으로 설계가 완료되었으며, 보도부분 누수에 대한 보수·보강없이 하부에 대한 보강공사 시행시 하자 및 보강효과 감소예상

2. 설계도면에 강관비계설치 수량이 단위당 수량과 전체물량이 표기되어 있으나 설계서 작성시 단위당 수량을 잘못 적용 계약되었으나 설계도면도 계약서임을 감안 설계변경시 실지 설치수량으로 설계변경이 필요

□ 조치의견

1. 상기와 같은사항으로 금번 공사구간에서 제외되었던 보도부에 대한 방수 및 재포장하여 시설물 유지관리 및 성능개선에 철저를 기하고자 하며, 추가로 소요되는 예산에 대하여 교량안전과에 재배정 요청

- 보도구간 방수 및 재포장 물량 및 개략공사비 **********

***************************************

2. 가설비계 수량 착오에 대하여는 설계변경시 실제 설치된 수량으로 정산시행함이 가할것으로 판단되며 추가로 소요되는 예산에 대하여는 낙찰차액을 활용하고 부족분에 대하여는 교량안전과에 재배정요청코자하며, 우선 도급자로 하여금 공사시행토록 하고 추후 설계변경시 정산코자함.

- 가설비계 물량 및 개략공사비 ***********

· 비계설치 물량 : **************************

· 가설비계공사비 : ************************

3. 또한, 증산교 성능개선공사에서 발생되는 폐기물은 기발주된 폐기물 처리용역(연간단가)에서 처리토록 하여 행정편의 및 환경관리에 철저를 기하고자 하며 추후 설계변경시 정산처리코자함.

- 폐기물 처리비 : **********

□ 예산사용검토

○ 추가 소요예산 ***********************************

- 사용가능예산 현황 :*********(낙찰차액)

(단위:천원)

*****	****	사용가능예산 ****	****** ******
*******	*******	******	******

○ 부족예산 : ****************************************

○ 교량안전과 추가 재배정요청 **********

(단위:천원)

****	*****	********	****
*********	*******	*******	*******

□ 행정사항

○ 2018. 9.      예산재배정 요청

○ 2018. 9~12  공사시행

○ 2018. 12.     공사준공

따로붙임  1. 정밀점검 용역보고서 1부.

2. 교량안전과 방침서 1부.

3. 산출근거 각 1부.   끝.