과 장		09/13 박병연	심사자	윤동원	설계자	김승진		설 계	심 사		결 재
								2018년 9월 일	2018년 9월 일
변 경 설 계 서(1회)
	공사명 : 2018년 도로시설물일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)-강서
	구 분			금 액 (원)
				당 초			변 경			증 · 감
	총 공 사 비			1,101,052,000			1,115,999,000			증) 105,947,000
	도급비	공 급 가 액		645,090,000			836,231,818			증) 191,141,818
		부 가 가 치 세		64,509,000			83,623,182			증) 19,114,182
		계		709,599,000			919,855,000			증) 210,256,000
	관 급 자 재 비			222,034,000			177,149,000			감) 44,885,000
	이 전 비			78,419,000			18,995,000			감) 59,424,000
○ 공사개요 : 콘크리트보수공(단면,표면) 1,470㎡ ⇒ 3,385㎡, 방수공 2,193㎡ ⇒ 2,110㎡ 신축이음보수공 106m ⇒ 752m, 강재보수공(잡철물제작 및 설치) 0㎏ ⇒ 545㎏, 기타 1식