행복한 변화, 사람 사는 동작
			동작구
수신		내부결재
(경유)
제목	설계변경(3회) 시행(관내하수시설물 유지 보수공사)

우리구에서 시행중인 『‘18년 관내 하수시설물 유지보수공사 (연간단가)』에 대하여  다음과 같이 설계변경(3회) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : ‘18년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2018. 2. 12 ~ 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜ 금토공영 대표 김태구

라. 예산과목

- 안전치수과, 안전한 생활환경 구축, 하수도관리, 하수시설물 관리, 시설비및부대비, 시설비(01)-구비

- 안전치수과, 안전한 생활환경구축, 치수관리, 하천관리, 시설비 및 부대비(401), 시설비(01)-구비

- 건설관리과, 공공용지의 효율적관리, 깨끗한 가로환경 조성, 노점·노상적치물 정비,시설비및부대비(401), 시설비(01)-구비

- 물순환안전국 물재생계획과, 자본적지출, 유형자산취득, 구축물 ,시설비및부대비(401), 시설비(01)(사업코드 : 빗물 유입시설확충 및 이설)-시비

- 물순환안전국 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비(214), 수선유지비(05)(사업코드 : 하수관로유지관리비)-시비

- 안전치수과, 재해및재난예방, 재해및재난관리, 재난관리기금운용, 재난대응및안전관리, 시설비및부대비(401), 시설비(01)-구기금

- 물순환안전국 하천관리과, 치수및하천관리, 치수사업, 재난예방(재난관리기금재난계정), 시설비(401-01)-시기금

※ 예산과목별 예산 반영내역(붙임 참조)

마. 설계변경 원가심사여부 : 일상감사 결과 반영

바. 설계변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	1,397,037,000	2,599,000,000	증)	1,201,963,000
도 급 비	1,158,080,000	2,047,320,000	증)	889,240,000
관급자재비	161,910,000	219,431,000	증)	57,521,000
이 전 비	16,162,000	198,511,000	증)	182,349,000
폐기물처리비	60,885,000	133,738,000	증)	72,853,000

붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 예산과목별 예산 반영내역 1부.

5. 설계변경 검토보고서 1부. 끝.

주무관	황재호		하수계획팀장	김정선		안전치수과장	황왕연		안전건설교통국장	전결 09/14 남궁용
협조자	가로관리팀장	고상기		계약팀장	김진수		재무과장	전제선
기획재정국장	이기완
시행	안전치수과-15606	(		)	접수		(		)
우	06928	서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동)	/	www.dongjak.go.kr
전화	02-820-9147	/전송	02-820-1453	/		/	대시민공개