설 계 변 경 사 유 서(3회)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 관내 하수시설물 유지 보수공사(연간단가)

○ 위    치 : 관내 전 지역

○ 규    모

- 하수관 부설 : D=250~1,000㎜,  L=1,542m

- 맨홀설치(1~3호) : N=44개소

- 빗물받이, 횡단빗물받이 신설 및 개량 : N=150개소, 기타 1식 등

○ 총공사비 : 1,397,037천원

(도급비 1,158,080천원, 관급비 161,910천원, 폐기물처리비 등 이설비 77,047천원)

○ 공사기간 : 2018. 2. 12 ∼ 2017. 12. 31

○ 시 공 자 : ㈜ 금토공영  대표 김 태 구

□ 설계변경사유

○ 추가 사업 시행으로 인한 신규공종 발생 및 물량 증·감

○ 기타 작업지시·완료에 따른 신규 공종 발생

○ 기성 준공 정산에 따른 물량 조정 증·감

□ 설계변경내용

- 주요 공사물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증.감(-)
하수관 부설	D=250~1000mm	m	1,542	1,987	445
맨홀설치	1호~3호	개소	44	78	34
빗물받이 신설 및 개량	1호~2호, 횡단빗물받이	개소	150	346	196
아스콘 표층포장	T=5Cm	a	38	64	26
경계석 및 블록설치	-	m	761	1,545	784

- 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	1,397,037,000	2,599,000,000	증)	1,201,963,000
도 급 비	1,158,080,000	2,047,320,000	증)	889,240,000
관급자재비	161,910,000	219,431,000	증)	57,521,000
이 전 비	16,162,000	198,511,000	증)	182,349,000
폐기물처리비	60,885,000	133,738,000	증)	72,853,000