문서번호	안전치수과-15454		주무관			하수계획팀장			안전치수과장	안전건설교통국장
결재일자	2018.9.13.
공개여부	비공개
			협조

2018년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)

제3회 설계변경 검토보고

2018년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가) 감독업무 수행중 설계변경(3회) 사항이 발생하여 아래와 같이 검토·보고 시행하고자 합니다.

2018.  9.   .

지방시설주사 황 재 호

공사개요

공 사 명 : 2018년 관내 하수시설물 유지보수공사(연간단가)

위    치 : 관내 전 지역

규    모

- 하수관 부설 : D=250~1000㎜,  L=1,542m

- 맨홀설치(1~3호) : N=44개소

- 빗물받이, 횡단빗물받이 신설 및 개량 : N=150개소, 기타 1식 등

총공사비 : 1,397,037천원

(도급비 1,158,080천원, 관급비 161,910천원, 폐기물처리비 등 이설비 16,162천원)

공사기간 : 2017. 2. 12 ∼ 2017. 12. 31

시 공 자 : ㈜ 금토공영  대표 김 태 구

설계변경 검토내용

설계변경 사유 (붙임 보고서 참조)

- 추가 사업 시행으로 인한 물량 증·감

- 신규 공종발생에 따른 변경

주요 공사물량 증·감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증.감(-)
하수관 부설	D=250~1000mm	m	1,542	1,987	445
맨홀설치	1호~3호	개소	44	78	34
빗물받이 신설 및 개량	1호~2호, 횡단빗물받이	개소	150	346	196
아스콘 표층포장	T=5Cm	a	38	64	26
경계석 및 블록설치	-	m	761	1,545	784
동작대로 문화거리 조성등	차폐벽 등 시설물 설치 등	식	0	1	1

일상 감사 내역

요청금액	심사금액	절감액	비 고
2,076,569,000	2,047,320,000	29,249,000	반영

- 일위대가 및 단가산출 조정

· 제11~13호표 벽돌쌓기 10%할증 제외 등 27개 일위대가 조정

· 단가 산출 잔토처리 재료비율 적용 및 t6 시간 삭제 조정

· 철강설 등 자재단가 조정

※  일상감사 절감액은 이설비에 포함 추후 하수시설물 유지보수에 활용

공사비 변경현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총 공 사 비	1,397,037,000	2,599,000,000	증)	1,201,963,000
도 급 비	1,158,080,000	2,047,320,000	증)	889,240,000
관급자재비	161,910,000	219,431,000	증)	57,521,000
이 전 비	16,162,000	198,511,000	증)	182,349,000
폐기물처리비	60,885,000	133,738,000	증)	72,853,000

설계변경 예산(추가) 현황

(단위 : 천원)

연 번	예 산 명	예 산 액	비 고
계		1,201,963
1	동작대로 문화거리 조성	625,000	구비
2	저지대 지하주택 침수방지 사업	30,000	구기금
3	노후 하수관로 긴급정비	350,000	시비
4	낙찰차액 및 심사 절감액	196,963	구비+시비

조치계획

일상감사 결과를 설계변경에 반영하고, 수해예방 및 안전사고 예방등 민원해소를 위하여 기 확보된 예산범위 내에서 상기와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 내역서(3회) 1부.

2. 설계변경 관련 보고서 각 1부.  끝.