투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	설계변경 조치의뢰(목동운동장 석면해체 및 교체공사)

목동사업과-8251(2018.09.18.)호와 관련하여,『목동운동장 석면해체 및 교체공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 개    요 -

가. 공 사 명 : 목동운동장 석면해체 및 교체공사

나. 도 급 자 : 태강산업개발㈜, ㈜특수건설

다. 계약금액 : *************

라. 공사기간 : 2018.06.25.~09.22.

마. 주요 공사내용

- 석면해체 : 천정 및 벽체 680㎡, 덕트 1개소, 개스킷 58개소(3묶음)

- 텍스 및 벽체설치 : 1,102㎡, 도장공사 1,749㎡ 등

바. 실정보고 주요내용

- 1차 : 석면해체 면적 증가 등********

- 2차 : 임대사무실 요청사항 반영, 제경비 정산 등*******

사. 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 2019년 제100회 전국체전 대비 시설개선, 시설비(목동야구장 천장 석면철거 및 교체설치)

************

********

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙 임  1. 설계변경 방침서, 공사실정 보고서(1, 2차) 각 1부.

2. 내역서 및 설계도면 각 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율검증서(계약금액, 산업안전보건관리비) 각1부.  끝.

	목동사업과장
주무관	이승언		목동사업과장	09/18 이정권
협조자	주무관	이동열		주무관	조성익
시행	목동사업과-8283	(		)	접수		(		)
우	07990	서울특별시 양천구 안양천로 939 (목동) 목동사업과	/
전화	02-2640-3831	/전송	02-2649-7145	/	sormang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)