명시이월사업조서

(단위 : 천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 예수마을교회주변 지중화사업 ∘위 치 : 다산로44길 76~ 퇴계로88길 48 ∘규 모 : 지중화 190m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 1,650,000 시 362,500, 구 562,500, 사업자 725,000 ∘추진사항 2018. 2. : 시예산편성 요청 2018. 3. : 한전 지자체승인 요청 2018. 4. : 시예산편성 재요청 - 2018. 5. : 한전 지자체승인 재요청 - 2018. 7. : 한전 지자체승인 재요청 - 2018. 7. : ‘19년도 시예산편성 요구	562,500 시 0 구 562,500	562,500 시 0 구 562,500	한전에 ‘18년도 지중화사업 지자체 승인 요청 하였으나 미반영되어 ‘19년도 지자체 승인 요청중에 있으며 시비 또한 미반영으로 금년도 지중화사업이 지연되고 있어 명시이월하여 사업추진
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			특별가로사업 (지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구

명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 태양마트 앞 동호로 지중화사업 ∘위 치 : 동호로7길 ∘규 모 : 지중화 250m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 2,700,000 시 625,000, 구 825,000, 사업자 1,250,000 ∘추진사항 2018. 1. : 시예산편성 요청 2018. 4. : 시예산편성 재요청 - 2018. 5. : 한전 지자체승인 요청 - 2018. 7. : 한전 지자체승인 재요청 - 2018. 7. : ‘19년도 시예산편성 요구 - 2018. 9. : 추경(구비) 확보 (325백만원) - 2018. 10. : 구 자체 투자심사	825,000 시 0 구 825,000	825,000 시 0 구 825,000	한전에 ‘18년도 지중화사업 지자체 승인 요청 하였으나 미반영되어 ‘19년도 지자체 승인 요청중에 있으며 시비 또한 미반영으로 금년도 지중화사업이 지연되고 있어 명시이월하여 사업추진
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			특별가로사업 (지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구

명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 퇴계로8길 지중화사업 ∘위 치 : 회현동주민센터~ 회현제2시범아파트 ∘규 모 : 지중화 340m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 2,600,000 시 600,000, 구 800,000, 사업자 1,200,000 ∘추진사항 2018. 1. : 시예산편성 요청 2018. 3. : 한전 지자체승인 요청 2018. 4. : 시예산편성 재요청 - 2018. 5. : 한전 지자체승인 재요청 - 2018. 7. : 한전 지자체승인 재요청 - 2018. 7. : ‘19년도 시예산편성 요구 - 2018. 10. : 구 자체 투자심사	800,000 시 0 구 800,000	800,000 시 0 구 800,000	한전에 ‘18년도 지중화사업 지자체 승인 요청 하였으나 미승인되어 ‘19년도 지자체 승인 요청중에 있음. 시비 또한 편성요구하였으나 미반영되어 금년도 지중화사업이 지연되고 있어 명시이월하여 사업추진
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			특별가로사업 (지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구

명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 신당초등학교 주변 지중화사업 ∘위 치 : 난계로128~퇴계로 90길 39 ∘규 모 : 지중화 190m ∘사업기간 : 2019. 1.~2019. 12. ∘총사업비 : 1,500,000 시 350,000, 구 450,000, 사업자 700,000 ∘추진사항 - 2018. 1. : 한전 지자체승인 - 2018. 6. : 한전 협약 체결 - 2018. 9. : 통신사 협약 체결 추진중	800,000 시 350,000 구 450,000	450,000 시 0 구 450,000	제반비용부담이 가중되는 기간통신사업자들의 피동 적인 사업추진 등의 사유로 사업지연 사례가 빈번함에 따라 자치구에서 적기 예산 집행에도 많은 어려움이 있음. 기간통신사업자의 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			특별가로사업 (지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구

명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 청파로(합동시장) 지중화사업 ∘위 치 : 청파로 461~443 ∘규 모 : 지중화 200m ∘사업기간 : ‘18. 10 ~ ’19.6 ∘총사업비 : 2,300,000천원 시 500,000, 구 800,000, 사업자 1,000,000 ∘추진사항 - ‘18. 07 : 협약체결 - ‘18. 08 : 설계완료 - ‘18. 09 : 자재수급 - ‘18. 10 : 착공예정	1,300,000 시 500,000 구 800,000	360,000 시 0 구 360,000	‘18년에 지중화 관로공사비를 지출하였으나 선로공사에 대한 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			특별가로사업 (지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구

명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 남산옛길 지중화 사업 ∘위 치 : 퇴계로12길 41~ 퇴계로12길 78 ∘규 모 : 250m ∘사업기간 : 2018.10.~2019. 6. ∘총사업비 : 2,297,000 구 1,490,000, 사업자 807,000 ∘추진사항 - 2018. 2. : 특별교부금 편성 - 2018. 3. : 한전 협약 체결 - 2018. 7. : 통신사 협약 체결 2018. 8. : 한전 공사비 납부 2018. 9. :통신사 관로공사비 납부	1,490,000 특금1,490,000 시 - 구 -	582,922 특금 582,922 시 - 구 -	‘18년에 지중화 관로공사비를 지출하였으나 선로공사에 대한 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
	도시기반시설 확충
		도로유지 관리
			특별 가로사업(지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구

명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 삼일대로8길(중부서 주변)지중화 사업 ∘위 치 : 삼일대로8길 ∘규 모 : 지중화 80m ∘사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 6. ∘총사업비 : 636,727 시 94,000, 구 267,500, 사업자 275,217 ∘추진사항 - 2017. 5 : 협약체결(한전) - 2017. 6 : 협약체결(통신사) - 2018. 3 : 한전 납부고지서 송부 - 2018. 8 : 시비 재배정 (94,000천원) - 2018. 9 : 구 추경예산 확보 - 2018. 9 : 한전 공사비 납부	361,500 시 94,000 구 267,500	66,457 시 0 구 66,457	공사비 부족으로 사업추진이 지연되었으나 2018년 제2회 추경(구비) 및 시비 추가 재배정을 통해 예산확보가 완료되어 사업을 추진코자 하였으나 통신사업자의 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
	도시기반시설 확충
		도로유지 관리
			특별 가로사업(지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구

명시이월사업조서

(단위:천원)

부서-정책-단위-세부 편성목(통계목)					명시이월 내용	예산액 (재원)	이월액 (재원)	명시 이월 사유
도로시설과					∘사 업 명 : 마른내로 지중화사업 ∘위 치 : 중구청사거리~ 명보극장사거리 ∘규 모 : 지중화 450m ∘사업기간 : 2018.10.~2019. 12. ∘총사업비 : 3,500,000 시 825,000, 구 1,025,000, 사업자 1,650,000 ∘추진사항 - 2018. 1. : 한전 지자체승인 - 2018. 2. : 한전 협약 체결	1,850,000 시 825,000 구 1,025,000	1,147 시 0 구 1,147	제반비용부담이 가중되는 기간통신사업자들의 피동 적인 사업추진 등의 사유로 사업지연 사례가 빈번함에 따라 자치구에서 적기 예산 집행에도 많은 어려움이 있음. 기간통신사업자의 실시설계 지연으로 지중화부담금이 확정되지 않아 예산 집행에 어려움이 있으므로 일부 예산을 명시이월하여 사업 추진
	도시기반시설 확충
		도로유지관리
			특별가로사업 (지중화)
				자치단체등자본이전 (공기관등에대한자본적위탁사업비)

○ 작성요령

- 예산액 및 이월액 : 재원별로 구분하여 기재 (국비, 시비, 구비, 특별교부세, 특별교부금 등)

- 천원 단위 작성 :  천원미만 금액은 절상하여 기재(추후 이월액 배정요구시 천원 미만 금액 기재하여 요구)

※ 명시이월사업조서 제출 이후 의회승인(2018. 11월중) 전 이월요구액 중 추가 지출 사유가 발생하여 이월요구액에 변동 사항이 있을 경우 반드시 공문으로 수정 요구