문서번호	박물관과-9675
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	기획팀장	공예박물관추진반장	박물관과장		문화시설추진단장
김숙경	김득삼	이은주	이사형		09/19 정진우
협 조

『서울공예박물관 개관대비』

2019년 정보시스템 구축 계획

2018. 9.

문 화 시 설 추 진 단

(공예박물관조성추진반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『서울공예박물관 개관대비』

2019년 정보시스템 구축 계획

서울공예박물관의 성공적 개관과 안정적이고 효율적인 업무수행 환경 기반조성을 위해 「2019년 서울공예박물관 정보시스템 구축」을 추진하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 경위

□ 추진배경

❍ ’17년도에 수립한 공예박물관「개관대비 정보시스템 구축 계획」에 의거 2~3단계 정보시스템 구축 사업을 ’19년도에 일괄 추진

□ 추진경위

❍ 건립 변경 기본계획 수립 (시장 방침 제186호)             : ’16.07.03.

❍ 개관대비 정보시스템 구축 계획 수립 (박물관과-13117호) : ’17.11.27.

❍ 건축 사업비 변경계획 수립 (박물관과-2421호)        : ’18.03.08.

- 사업기간 변경 : 2020년 5월 개관

구 분	당 초	변 경
공사기간	2018. 3. ~ 2019. 3.	2018. 4. ~ 2020. 1.
개 관	2019. 5. (개관준비 2개월)	2020. 5. (개관준비 4개월)

❍ 정보화전략계획(ISP) 수립 추진 (박물관과-4973호) : ’18.08.01.~12.21.

- 공예박물관 정보화시스템 구축을 위한 중장기계획 마련

Ⅱ		추진방향

❍ 공예박물관 개관에 대비한 운영기반 조성 중심의 정보화사업 추진 ⇒ 인프라 구축 예산 집중 투입 필요

❍ ’18.12월 수립되는 정보화전략계획(ISP)에 따라 공예전문 박물관으로서의 특성을 반영한 체계적인 정보시스템 구축 사업 추진

Ⅲ		추진계획

□ 추진목표

❍ 유기적이고 체계적인 공예박물관 통합 운영관리 체계 구축

❍ 서울공예박물관 개관(’20.5월)에 맞춰 안정적인 운영 기반 마련

□ 성과지표

❍ 공예정보자원의 전자화율

- (전자화된 정보 건수 / 총 정보자원 건수)×100%, 40% 증가

❍ 공예정보자원 공개율

- (공예정보의 웹 공개 건수 / 총 정보자원 건수) ×100%, 40% 증가

□ 추진개요

❍ 사 업 명 : 서울공예박물관 정보시스템 구축 사업

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

❍ 추진방법 : 전문업체 용역

❍ 소요예산 : 2,401백만원 (시비)

❍ 사업내용

- 서울공예박물관 정보시스템 운영 인프라 구축

- 서울공예박물관 출입관리시스템 구축

- 서울공예박물관 웹 서비스 개선 및 정보 연계 기능 개발

- 디지털 공예아카이브 구축 사업 추진

- 서울공예박물관 자료 분류체계 설계

- 서울공예박물관 통합관리시스템 개발

□ 세부사업내용

❍ 서울공예박물관 정보시스템 운영 인프라 구축

- 내부업무 시스템 운영 및 대시민서비스 제공을 위한 서버 등 하드웨어 및 상용 소프트웨어 구매 설치

▸ H/W : WEB/WAS 서버, 스토리지 등

▸ 상용S/W : 검색엔진, 리포팅툴 등

- 보다 빠르고 안정적인 통신서비스 제공 및 통신회선 비용 절감 등을 위해 광대역 자가정보통신망 구축

▸ 광케이블 포설 시설공사, 광전송장비 구축 등

❍ 서울공예박물관 출입관리시스템 구축

- 관람객 출입관리 및 전시실 이용 현황 파악 등을 위해 발권관리 및 관람객집계 시스템 구축

▸ 주 출입구(3개소)에 현장매표시스템 및 무인발권기 설치(각 3식)

▸ 출입관리가 필요한 도서관·개방수장고 등에 검표장비 설치(5식)

▸ 각 전시실 관람객 이용현황 파악을 위해 관람객 집계장비 설치(12식)

- 직원 출입관리 및 방범·화재예방을 위해 출입통제시스템 설치

▸ 각 사무실 및 전시실 등에 시 공무원증과 연동되는 출입통제시스템 설치(60식)

❍ 웹 서비스 개선 및 정보 연계 기능 개발

- 공예자료 통합검색 기능 및 팝업존 기능 개발

- 웹 서비스와 타 정보시스템 간 연계 기능 개발

▸ 공예관련 정보 제공을 위해 공예박물관 통합관리시스템과 연계

▸ 교육 프로그램 예약을 위해 공공서비스예약과 연계 등

❍ 디지털 공예아카이브 구축 사업 추진

- ’18년도 공예아카이브 용역 성과품을 전시·교육에 활용하고, 대시민서비스를 제공하기 위해 디지털 데이터로 가공·변환

▸ 대상: ’18년도 한국 근대공예유산 기록자료 아카이브 용역 성과품

▸ 내용

· 공예아카이브 기록 디지털 데이터로 가공·변환(디지타이징) : 용역성과품을 디지털 데이터로 변환, 메타데이터 입력, 콘텐츠 가공, DB 구축

· 디지털아카이브 파일럿컬렉션 개발 : 디지털 데이터로 가공·변환된  아카이브 자료를 웹 서비스하기 위한 시범운영 웹 프로그램 개발

❍ 서울공예박물관 자료 분류체계 설계

- “공예”전문 박물관으로서의 고유하고 독창적인 성격과 기능에 따라 자료를 분류할 수 있는 자료 분류체계 설계 추진

▸ 국내외 “공예자료” 현황 조사 및 분석

▸ “공예자료” 분류체계 개발 및 유형별 개념 구체화

▸ “공예자료” 메타데이터 구조 설계

▸ “공예자료” 가치평가용어 구체화 및 DB 구축·분석

❍ 서울공예박물관 통합관리시스템 개발

- 소장품 정보 및 공예품 제작과정 등의 자료관리는 물론 유물구매, 전시기획 등의 업무처리 과정이 시스템을 통해 모두 관리되는 통합시스템 개발

- 외부기관 등과 연계하여 보다 다양한 정보수집이 가능하도록 내·외부망 연계시스템 구축

- 메타데이터를 활용한 연관정보 검색 기능을 개발하여 직원 간 정보 공유 체계 구축

□ 소요예산 : 2,401,209천원  (※ 세부 산출내역 붙임 참조)

❍ 예산과목 : 도시개발특별회계, 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 서울 공예박물관 건립

통계목	산출유형	사업내용	금액(천원)
전산개발비 (205-207-02)	계	-	1,219,914
	응용 S/W 신규개발비	S/W 신규 개발	859,714
		∙통합관리시스템 개발	802,214
		∙디지털아카이브 파일럿시스템 개발	57,500
	응용 S/W 재개발비	웹 서비스 기능 개선·추가 개발	46,552
	데이터베이스 구축비	공예아카이브 자료 디지타이징	42,500
	정보시스템 감리비	정보시스템 구축 감리	121,148
	직접경비 등 기타비용	자료 분류체계 설계 연구용역	150,000
자산 및 물품취득비 (205-405-01)	계	-	1,092,695
	하드웨어(H/W) 구매	H/W 구매(서버 등)	706,693
		∙서버 등 H/W 기반조성	568,203
		∙발권 장비 구매	105,490
		∙관람객집계 장비 구매	33,000
	상용 S/W 구매비	S/W 기반조성(검색엔진 등)	386,002
시설비 (205-401-01)	계	-	88,600
	직접경비 등 기타비용	자가정보통신망 구축 공사	62,238
		출입통제시스템 설치 공사	26,362

Ⅳ		향후계획

❍ 공예박물관 정보화전략계획(ISP) 수립 ·············· ’18. 12월

❍ ISP 수립 결과 반영 정보시스템 세부 구축 계획 수립 ····· ’19. 1월

❍ ’19년 정보시스템 구축 사업 추진 ················· ’19. 2월~12월

붙임 : 2019년 정보시스템 구축 사업비 세부산출 내역 1부.

[붙임]

2019년 공예박물관 정보시스템 구축

사업비 세부 산출내역

1. 응용S/W 신규 개발비

구 분	개발원가	이윤 (개발원가 × 이윤율(5%))	개발비산정 총액 (개발원가+이윤)	부가가치세 (개발비산정 총액 × 10%)	총사업비 (개발비총액 + 부가가치세)	소요예산 (단위 : 천원)
통합정보 시스템	694,557,171원	34,727,859원	729,285,030원	72,928,503원	802,213,533원	802,214
파일럿 시스템	50,760,047원	1,535,179원	52,295,226원	5,229,523원	57,524,749원	57,500
소요예산 합계 (천원)						859,714

2. 응용S/W 재개발비

구 분	개발원가	이윤 (개발원가 × 이윤율(5%))	개발비산정 총액 (개발원가+이윤)	부가가치세 (개발비산정 총액 × 10%)	총사업비 (개발비총액 + 부가가치세)	소요예산 (단위 : 천원)
홈페이지	40,304,667원	2,015,233원	42,319,901원	4,231,990원	46,551,891원	46,552

3. 데이터베이스 구축비

구분		투입인력등급	투입인력 일임금(원/일)	소요공수 (MD)	금액(원)
직접 인건비	현대간행물 일반공정	자료입력원	88,096	141.93290	12,503,720
	현대비도서편철문서 일반공정	자료입력원	88,096	2.06177	181,634
	동영상 일반공정	초급기술자	191,320	33.85000	6,476,459
	음성 일반공정	초급기술자	191,320	31.03000	5,935,910
	소 계			208.87467	25,097,723
제경비	직접인건비의 40%				10,039,089
이윤	(직접인건비+제경비)×10%				3,513,681
합 계					38,650,493
부가가치세				합계×10%	3,865,049
총사업비					42,515,543
소요예산				(천원단위)	42,500

4. 하드웨어(H/W) 구매비

연번	구 분		규 격	수량	단가	금액(원)
1	WEB서버		1CPU(8Core), 128GB RAM, 2.4TB HDD 이상	1	15,345,000	15,345,000
2	WAS서버		1CPU(8Core), 128GB RAM, 2.4TB HDD 이상	1	15,345,000	15,345,000
3	검색서버		1CPU(6Core), 32GB RAM, 3.6TB HDD 이상	1	12,661,000	12,661,000
4	리포팅서버		1CPU(6Core), 32GB RAM, 600GB HDD 이상	1	10,872,000	10,872,000
5	미디어서버		1CPU(6Core), 32GB RAM, 1.2TB HDD 이상	1	11,127,000	11,127,000
6	SAN 스토리지 (내부망: 서버용)		가용 50TB 이상	1	73,505,000	73,505,000
7	SAN 스토리지 (내부망: 원문용)		가용 50TB 이상	1	73,505,000	73,505,000
8	NAS 스토리지 (내부망: 파일공유용)		가용 10TB 이상	1	26,460,000	26,460,000
9	SAN 스토리지 (외부망: 서버용)		가용 10TB 이상	1	26,460,000	26,460,000
10	SAN Switch (내부망)		8Gbps 16Port 이상	2	8,336,500	16,673,000
11	SAN Switch (외부망)		8Gbps 16Port 이상	2	8,336,500	16,673,000
12	망연계모듈		SDR engine	2	45,050,000	90,100,000
13	망연계 중계 서버 (스트리밍서비스용)		1CPU(4Core), 32GB RAM, 240GB HDD 이상	2	10,946,000	21,892,000
14	망연계 중계 서버 (외부망: 자료전송용)		1CPU(4Core), 32GB RAM, 240GB HDD 이상	1	10,946,000	10,946,000
15	망연계 중계 서버 (내부망: 자료전송용)		1CPU(4Core), 32GB RAM, 4.8TB HDD 이상	1	13,320,000	13,320,000
16	L4 Switch		8Port	4	20,416,000	81,664,000
17	발권장비	현장발권 장비	발권PC, 티켓·영수증 프린터 포함	3	2,850,000	8,550,000
18		무인발권기	Intel Dual Core 이상, 2G DDR3, 64G SSD	3	7,600,000	22,800,000
19		발권플랫폼	현장발권기 및 무인발권기와 연동을 통한 발권통계 등 제공	1	35,000,000	35,000,000
20		검표용 장비	PC, 모니터, 마우스, 스탠다드형 2D 바코드(또는 손잡이형 2D바코드)	5	1,710,000	8,550,000
21		검표 시스템	티켓 유효성 검사 모듈(관람시간 및 입장불가 시설 체크 기능 등 제공)	1	21,000,000	21,000,000
22	관람객집계용 CCTV		집계용 CCTV, 관리프로그램 등	12	2,500,000	30,000,000
합 계						642,448,000
부가가치세				(합계×10%)		64,244,800
총사업비						706,692,800
소요예산				(천원단위)		706,693

5. 상용 소프트웨어(S/W) 구매비

연번	구 분	용 도	수량	단가	금액(원)
1	WEB서버 S/W (업무용, 웹서비스용)	웹 브라우저 요청 중 정적 데이터 처리를 위한 S/W	16	1,641,000	26,256,000
2	WAS서버 S/W (업무용, 웹서비스용)	웹 브라우저 요청 중 동적데이터, 웹 애플리케이션이 동작하도록 지원해 주는 S/W	3	5,362,500	16,087,500
3	검색S/W (업무용, 웹서비스용)	대용량 데이터 검색용	16	9,845,000	157,520,000
4	검색S/W 커스터마이징	수요자 요구에 맞춘 검색서비스 구축을 위한 변경 작업 수행	1	39,852,800	39,852,800
5	서버보안S/W (업무용, 웹서비스용)	서버 무단 접근 및 정보자산에 대한 불법적인 변조·삭제·탈취 등 차단	2	2,505,000	5,010,000
6	리포팅S/W (업무용, 웹서비스용)	다양한 형태의 보고서 및 통계 제공	4	16,420,000	65,680,000
7	웹콘텐츠보안 S/W (웹서비스용)	웹페이지 중요정보의 무단 사용 및 불법유통 방지용	1	26,670,000	26,670,000
8	스트리밍 S/W (웹서비스용)	동영상등록변환 및 실시간 동영상 재생 기능 제공	1	19,500,000	19,500,000
9	백신 S/W (웹서비스용)	악성코드 탐지/치료	1	25,000,000	25,000,000
합 계					381,576,300
조달수수료(1~8번 합계×0.54%) + 부가세(9번×10%)					4,425,512
총사업비					386,001,812
소요예산			(천원단위)		386,002

6. 정보시스템 감리비 : 3단계감리(요구정의, 설계, 종료) 적용

❍ 기본감리비

[eqn: pile{특급기술자#평균임금} TIMES LEFT ( 1+제경비율 RIGHT ) TIMES LEFT ( 1+기술료율 RIGHT ) TIMES 22.13 TIMES LEFT ( {감리대상사업비보정금액} over {1억원} RIGHT ) ^{0.63}]

391,068원 × (1+110%) × (1+20%) × 22.13 × (1,307,165,746원÷100,000,000원)0.63

= 110,134,288원

❍ 감리비 = 기본감리비 +직접경비 + 부가가치세(VAT)

= 110,134,288원 + 0원 + 11,013,429원

= 121,147,717원

❍ 소요예산 : 121,148천원

7. 직접경비등 기타비용

연번	용도	규격	세부사항	수량	총사업비	소요예산 (단위 : 천원)
1	출입통제시스템 설치 공사	방범, 출입관리, 화재 이상통보 기능 제공	사무실 및 전시실 등 60개소에 출입통제 장비 설치	1	26,361,500원	26,362
2	광대역 자가정보통신망 구축 공사	12core 광케이블 포설	광케이블 포설(12core), 도로굴착, 광전송장비 구축, 각종 재료비 등	1	62,238,000원	62,238
3	공예자료 분류체계 및 구체화 방안 연구용역	-	공예자료 분류체계 설계 및 구체화 방안 연구	1	150,754,559원	150,000
소요예산 합계				(천원단위)		238,600