문서번호	시설관리과-17338
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재현	이무규	代문병희		09/19 최생인
협 조

『2018년도 상수도관 전기방식공사』

예비준공검사 시행계획

2018. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 상수도관 전기방식공사

예비준공검사 시행계획

2018년 상수도관 전기방식공사의 전반적인 공사 상태 등에 대한 예비준공검사를 실시하여 사업 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

○ 건설공사 예비준공검사 시행 방법 개선[기술심사담당관-10083(2018.06.28.)호]

○ 2018년도 전기방식공사 예비준공검사 요청[건기단-*******5(2018.09.18.)호]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 상수도관 전기방식공사

○ 공사규모 : 정류기 2개소, 양극홀 4개소, 전기배선공사 1식

○ 공사기간 : 2018.5.16.~2018.10.12

○ 공사금액 : *********

○ 시 공 자 : ***************

○ 감 리 자 : **************

○ 현재공정률 : 약95%

□ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2018. 09. 19(수) 10:00~

○ 장    소 : 구로구 개봉동 74-44번지 외 1개소 전기방식 공사현장

○ 점 검 자(입회자)

- 강서수도사업소 : 기전팀장 이무규, 공업8급 김재현

- 감리원 : 책임감리원 홍영화

○ 시 공 자 : 현장대리인 차완호

○ 주요 점검내용
- 구조 및 외관검사
- 방식 전위 측정, 각종 계기 동작 시험
- 출력전압조정범위, 접지저항 측정 등

□ 향후계획

○ 2018. 09. 19 ~ 09. 28 : 지적사항에 대한 보완조치
○ 2018. 10. 01 ~ 10. 05 : 설계변경 시행

○ 2018. 10. 12  : 공사 준공

붙 임 : 예비준공 주요점검 및 참석자 명단(양식) 각 1부.  끝.